현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가) 설계변경(3회) 시행 및 준공기한 연기

우리구에서 시행중인『2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)』에 대하여 다음과 같이 설계변경(3회) 시행 및 준공기한을 연기하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)

2. 공사기간 : 2022. 03.24. ~ 2022. 12. 31.

3. 계약금액 : *******************************

4. 계약상대자 : ㈜천일건설 대표 황기진

5. 설계변경 사유 : 추경예산 및 제설용역 반영으로 인한 시공물량 증·감 발생

6. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	2,053,967,970	2,453,024,000	증	399,056,030
도 급 비	1,109,688,000	1,713,328,000	증	603,640,000
관 급 비	709,624,495	566,064,000	감	143,560,495
이 전 비	234,655,475	173,632,000	감	61,023,475

7. 준공기한 연기내역

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	22.03.22. ~ 22.12.31.	22.03.22. ~ 23.03.31.

※ 준공기한 연기 사유 : 동절기 제설대책 추진

8. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 제설대책 추진, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 재난 및 재난복구능력강화, 재난관리기금운용, 재해예방 및 응급복구, 시설비(구 재난관리기금)

붙임 : 1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 일상감사 결과 및 의견서 1부.

4 설계변경 검토보고 1부.  끝.

주무관	한상오		도로시설담당	이태기		재무과장	代김미경		건설교통국장	12/16
김석우
협조자	계약담당	신정경		도로과장	송승익
시행	도로과-23120	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3562	/전송	02-2241-6561	/	hso1983@sb.go.kr	/	부분공개(5)