문서번호	도로과-23080		주무관		도로시설담당	도로과장		건설교통국장
결재일자	2022. 12. 16.		한상오		이태기	송승익		12/16
공개여부	부분공개(5)							김석우
방침번호			협조
방침번호

2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)

설계변경(3차) 및 준공기한 연기 검토보고

2022. 12.

건설교통국

(도   로   과)

2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가) -

설계변경(3회) 및 준공기한 연기 검토보고

우리 구에서 시행 중인「2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)」관련하여 추가경정예산사업 및 제설용역 반영 등으로 신규공정 발생 및 시공물량이 변경되어 설계변경(3차)등 준공기한을 연기코자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ ’22. 9. 20.  : 추가경정예산 등 집행계획 보고

□ ’22. 11. 1.  : 권역별 제설작업 용역 시행계획 보고

□ ’22. 11. 11. : 낙찰차액 등 집행잔액 사용계획 검토 보고

□ ’22. 4. ~ 11. : 도로시설물 작업지시(2차 ~ 8차)

Ⅱ		공 사 개 요

□ 2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가)

- 위    치 : 성북구 관내

- 사업기간 : ’22. 3. 24. ~ 12. 31.

- 공사규모

· 도로포장 115a, 보도포장 14a, 도로시설물 설치 및 교체 1식 등

- 계 약 자 : ㈜천일건설 대표 황기진

- 계약금액 : 금1,109,688천원(금일십일억구백육십팔만팔천원)

- 예산과목

· 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 도로시설물유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

· 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 제설대책 추진, 시설비(구비)

· 재난 및 재난복구능력강화, 재난관리기금운용, 재해예방 및 응급복구, 시설비(구 재난관리기금)

Ⅲ		설계변경 내용 및 준공기한 연기

설계변경 사유

○ 추경예산 및 제설용역 반영으로 인한 시공물량 증·감 발생

설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총사업비	2,053,967,970	2,453,024,000	증	399,056,030
도 급 비	1,109,688,000	1,713,328,000	증	603,640,000
관 급 비	709,624,495	566,064,000	감	143,560,495
이 전 비	234,655,475	173,632,000	감	61,023,475

주요 설계변경 내용

구 분	당 초	변 경	비고
준공기한	22.03.24. ~ 22.12.31.	22.03.24. ~ 23.03.31.

구 분	당 초		변 경		증 감
도로포장	115	a	132	a	증	17	a
보도포장	15	a	27	a	증	12	a
경계석 설치	1,930	m	3,241	m	증	1,311	m

동절기 제설용역 추진에 따른 준공기한 연기

Ⅳ		향 후 계 획

상기 보고내용와 같이 추가예산 확보에 따른 신규공종 발생과 시공물량 증·감 내역을 반영하여「2022년 도로시설물 유지보수공사 2권역(연간단가) 설계변경(3회) 시행 및 준공기한 연기조치코자 함

예산내역

연 번	예산과목	예산액 (천원)	비고
1	도로과, 안전하고 쾌적한도로환경조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 도로시설물유지보수공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)	2,078,900
2	도로과, 안전하고 쾌적한도로환경조성, 환경친화적이고 특색있는 도로관리, 제설대책 추진, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)	174,124
3	재난 및 재난복구능력강화, 재난관리기금운용, 재해예방 및 응급복구, 시설비(구 재난관리기금)	200,000
합 계		2,453,024

붙임 : 1. 설계변경 내역서(3회) 1부.

2. 관련 보고서 1부.  끝.