문서번호	시설관리과-35684
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
유명수		장현준	12/16
			송병욱
협 조

실정 보고서 검토

('22년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역)

2022. 12. 16.

북부수도사업소

(시설관리과)

실정 보고서 검토

('22년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역)

1. 용역 현황

가. 용 역 명 : 2022년 강북구관내 상수도맨홀 정밀점검용역

나. 도 급 비 : 236,615,000원

다. 용역기간 : 2022. 3. 11 ~ 12. 31

라. 도 급 자 : (주)정신이앤시 대표 안과헌

2. 보고내용 : 맨홀 정밀점검 중 개폐가 불가한 맨홀 및 GIS 기준 매몰된 맨홀의     조사비용에 대한 변경건

가. 물량변경

구 분	개소	정산 방안	사 유
계	182
개폐불가	11	조사비용 대가 신설	철개 노후화 및 GIS 미일치
매몰	171

3. 조치계획 : 상기와 같은 사항으로 맨홀 조사중 변경된 물량에 대하여 조사비용     감액하여 추후 설계변경에 반영하겠음.

가. 물량변동에 대한 정산방안

구 분	개소	정산 방안	비고
계	182
개폐불가	11	조사비용중 초급기술자비용 공제
매몰	171	조사비용중 외업비용 공제

붙임  실정보고공문 1부.  끝.