아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 계약 의뢰(여의2교 보수공사)

2022년도 예산사업으로 추진중인 “여의2교 보수공사”에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 여의2교 보수공사

나. 공사개요 : 표면보수 2,579㎡, 단면보수 232㎡ 등

다. 공사기간 : 2022.07.25 ~ 2022.12.21

라. 계약금액 : 금438,070,000원

마. 계 약 자 : 해주건설(주)  대표 신진하

바. 변경사유 : 신규공종발생 및 시공물량 증감에 따른 계약금액 조정

사. 예산과목 : 교량안전과, 교량관리(도시개발특별회계), 여의2교 보수공사,

시설비및부대비, 시설비

아. 설계변경 내역                                                  (단위:원)

구 분		당 초	변 경	증・감
총 공사비		441,860,000	388,144,000	감) 53,716,000
도급비	공급가액	398,245,455	352,530,000	감) 45,715,455
	부가가치세	39,824,545	35,253,000	감) 4,571,545
	계	438,070,000	387,783,000	감) 50,287,000
이 전 비		3,790,000	361,000	감) 3,429,000

붙임 : 1) 방침서 1부.

2) 관련공문(서울시설공단 실정보고 등) 1부.

3) 설계변경도서 1부.

4) 설계변경사유서 및 합의각서 각1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	강연홍		시설보수과장	12/16
임형규
협조자
시행	시설보수과-27944	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 시설보수과 (마곡동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	kyh7321@seoul.go.kr	/	부분공개(5)