아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	북부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경 시행 [2022년 도봉,노원구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역]

우리 사업소에서 시행중인 『2022년 도봉,노원구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역』건에 대해 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

1. 용 역 명 : 2022년 도봉,노원구 관내 상수도 맨홀 정밀점검 용역

2. 계약업체 : ㈜정신이앤시 안과헌

3. 계약기간 : 2022. 3. 11. ~ 12. 31

4. 변경내역

구 분	당초금액	변경금액	증·감액	비 고
공급가액	312,689,091	310,530,000	감)2,159,091
부 가 세	31,268,909	31,053,000	감)215,909
총용역비	343,958,000	341,583,000	감)2,375,000

5. 설계변경 사유 : 물량변동 및 신규공종 발생

6. 예산과목

-  상수도사업본부,영업비용,배급수비,수선유지교체비,수선유지비

(상수도 밸브실 등 지하시설물 유지관리-22207)

붙임 : 설계변경 관련 서류 각 1부.   .

주무관	박상권		주무관	김명석		급수운영과장	이승완		북부수도사업소장	12/16
권태규
협조자	급수관리팀장	代박상권		주무관	김태석
시행	급수운영과-36729	(	2022. 12. 16.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935, 4층 (번동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3343	/전송	02-3146-3389	/	psk300@seoul.go.kr	/	부분공개(6)