문서번호	토목부-36664
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
박희정		김동철	12/16
			代김동철
협조

제2자유로 종점부 입체화 공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

계약금액 조정(총차11회, 4차3회) 검토 보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

제2자유로 종점부 입체화 공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

계약금액 조정(총차11회, 4차3회) 검토 보고

관급자재 수급차질, 억새축제기간 공사중지, 동절기 기온 급강하로 인한 레미콘 타설 제한, 가로수 식재 적정시기 경과에 따라 본 공사의 사업 기간이 조정됨에 따라 ********************하여 건설사업 관리에 만전을 기하고자 함(토목부-336497호, 사업기간 조정검토 보고)

□ 용역개요

ㅇ 용  역  명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

ㅇ 용 역 기 간 : ***********************

ㅇ 계 약 금 액 : **************

ㅇ 계약 상대자 : *************

□ 보고내용

ㅇ ******************************************************************************************************

*********************************************************

ㅇ 사업 기간이 조정됨에 따라 *******************이 필요한 실정임.(당초 대비 3개월 연장)

□ 계약금액 조정 검토

ㅇ 총차11회                                                   (단위  : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 . 감(△)
총 용 역 비		*************	*************	***********
용역비	공급가액	*************	*************	***********
	부가가치세	***********	***********	**********
용 역 기 간		****************	****************	*****

- 배치 계획표(붙임 내용 참조)

※ **********************************

ㅇ 4차 3회                                                     (단위  : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 . 감(△)
총 용 역 비		1,295,591,000	*************	***********
용역비	공급가액	1,177,810,000	*************	***********
	부가가치세	117,781,000	***********	**********
용 역 기 간		22. 1.20~23. 1.31	*****************	*****

□ 조치계획

○ 총무부(재무과) 및 계약상대자에게 위 계약 변경 내역을 통보하여 계약관련 후속 절차를 진행토록 하고 이후 건설사업관리 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 : 1. 계약금액 조정 내역(총차11회, 4차 3회) 각 1부.

2. 사업기간 조정 검토 보고(`22.12.16.) 1부.   끝.