문서번호	동북권사업과-3323
결재일자	2022. 12. 16.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	지역협력팀장	동북권사업과장
민슬기	권혜경	12/16
		오대중

걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 검토 보고

2022. 12.

균형발전본부

(동북권사업과)

걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역

준공기한 연기 검토 보고

구의역 일대 도시재생활성화사업의 일환으로 추진중인「걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역」의 준공기한 연기를 검토 보고드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 걷고싶은 미가로조성사업 기본 및 실시설계 용역

******************************************************************

**************************************

************************************************

****************

*******************************

**************************

□ 추진경위

❍ 용역 계약 체결 및 착수	: '21.11.23.

❍ 착수보고회 개최	: '21.12.28.

❍ 용역 2차 계약 및 착수	: '22. 3.24.

❍ 전문가 자문회의(1차)	: '22. 4.12.

❍ 중간보고회 개최	: '22. 5.23.

❍ 공공디자인진흥위원회 심의(결과: 재심)	: '22. 8.11.

❍ 공공디자인진흥위원회 재심의(결과: 재심)	: '22.10.13.

❍ 공공디자인진흥위원회 재심의(결과: 조건부동의)	: '22.11.24.

□ 준공기한 연기 검토

*****************************

*******************************************************************

*****************************

*******************************************

******************************************************************************************************************************************************

****************

□ 향후 일정

*********************************************

**************************************

*************************************

붙임 : 1. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

2. 계약기간 변경 요청서(합의각서, 예정공정표) 1부. 끝.