문서번호	설비부-34598
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로설비과장	설비부장
김세익		代임현철	12/19
			代장병선
협 조

『시립청소년 음악창작센터 건립 소방공사』 기성검사(2차 2회) 결과보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 소방공사』

기성검사(2차 2회) 결과보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『시립청소년 음악창작센터 건립 소방공사』

기성검사(2차 2회) 결과보고

『시립청소년 음악창작센터 건립 소방공사』관련 건설사업관리단으로부터 기성검사(2차 2회) 결과가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		사업개요

□ 공 사 명 : 시립청소년 음악창작센터 건립 소방공사

□ 위    치 : 서울특별시 양천구 신정동 1290-6 외 4필지

□ 규    모 : 지하1층/지상6층, 연면적 5,422㎡ (청소년수련시설)

□ 계약현황

계약건명	계약자	차수	계약기간	계약금액(원)
소방공사	(주)대진소방	총차	2020.06.24.~2022.01.30.	986,206,347
		2차	2021.09.15.~2022.01.30.	956,206,347

□ 건설사업관리단 : (주)종합건축사사무소근정 외 1개사

Ⅱ		관련근거

□ 지방계약법 제17조, 같은법 시행령64조, 공사계약일반조건 제27조(검사)

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제10조(발주청의 지도 감독 및 업무범위)

□ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제102조(기성·준공 검사자 임명 및 검사기간) 제103조(기성·준공검사 및 재시공)

□ 소방공사 2차 제2회 기성검사 보고[근정 제2022-529호(2022.12.15.)]

Ⅲ		기성검사 결과

□ 검 사 일 : 2022.12.15.(목)

□ 검 사 자 : 책임 건설사업관리기술인, 소방 기술지원 건설사업관리기술인

□ 입 회 자 : 담당 주무관, 통신 건설사업관리기술인, 현장대리인

□ 기성검사 요청금액                                         (단위 : 원)

구분	계약금액	전회기성	금회기성	누계금액	잔액
도급액(2차)	956,206,347	400,000,000	400,000,000	800,000,000	156,206,347

□ 건설사업관리단 기성검사 결과서

연번	검 사 항 목	검사결과
1	준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지 여부	적합
2	공사시공 시 현장 상주기술인이 비치한 제기록에 대한 검토	적합
3	폐품 또는 발생물의 유무 및 처리의 적정여부	적합
4	지급자재의 사용 적부와 잉여장재의 유무 및 그처리의 적정여부	적합
5	제반 설비의 제거 및 원상복구 정리상황	적합
6	건설사업관리기술인의 준공검사원에 대한 검토의견서	적합

Ⅳ		입회결과

□ 기성검사자가 계약서, 시방서, 설계서 등 관계서류에 따라 준공검사를 실시하였으며, 이상 없음을 확인함.

Ⅴ		조치계획

□ 건설사업관리단에서 실시한 기성검사 결과 적합한 것으로 확인되어 기성검사 결과를 계약부서에 통보 조치하고자 함

붙임  기성검사 검토보고 1부.  끝.