아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강서도로사업소
수신	대영유비텍(주)
(경유)
제목	설계변경 승인 회신(2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사)

1. 문서번호 대영GE22A-12-37호(2022.12.16.) 설계변경 요청 관련입니다.

2. 설계변경 요청한 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사에 대하여 아래와 같이 승인

하고 회신하오니 변경계약 및 공사시행(준공) 등 감리업무 처리에 만전을  기하여

주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2022년 교통사고 잦은 곳 교통신호기 공사

나. 공사기간 : 2022.08.17. ~ 2022.12.22.

다. 계약업체 : (주)삼천리이엔지 대표 손원현

라. 설계변경 승인내용

구 분	당 초	변 경	증 · 감
도 급 비	158,690,000원	145,240,000원	감) 13,450,000원

끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	오태환		기전과장	12/19
代호정오
협조자
시행	기전과-29311	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7964	/전송	02-2657-7939	/	taehwan12@seoul.go.kr	/	대시민공개