현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
	성 북 구
수신	내부결재
(경유)
제목	2022년 포장도로 유지보수공사(연간단가) 설계변경(정산) 시행

우리 부서에서 시행 중인「2022년 포장도로 유지보수공사(연간단가)」에 대하여 다음과 같이 설계변경(정산)을 시행하고자 합니다.

1. 공 사 명 : 2022년 포장도로 유지보수공사(연간단가)

2. 공사기간 : 2022. 3. 22. ~ 2022. 12. 31.

3. 계약금액 : 금841,600,000원(금팔억사천일백육십만원)

4. 계약상대자 : ㈜치산치수 대표 박흥자

5. 설계변경 사유

- 현장 여건에 따른 신규공종 발생 및 단순 시공(계약) 물량 증·감

6. 설계변경 금액

(단위:원)

구 분	당 초	변 경	증 감		비 고
총사업비	1,485,000,000	2,015,000,000	증	530,000,000
도 급 비	841,600,000	1,182,860,000	증	341,260,000
관 급 비	452,500,000	651,140,000	증	198,640,000
이 전 비	190,900,000	181,000,000	감	9,900,000

7. 예산과목

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 포장도로 유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 도로과, 안전하고 쾌적한 도로환경 조성, 환경친화적이고 특색있는  도로관리, 횡단보도(턱낮춤) 개선정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비(구비)

- 보행자전거과, 보행권 향상 및 교통약자 안전관리, 교통약자 이동편의 증진, 어린이 안전 영상정보 인프라 구축, 시설비및부대비, 시설비(시비)

※ 일상감사 완료 : 감사담당관-22536호(2022. 12. 15.)

붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 일상감사 의견서 1부.

4. 설계변경 검토보고서 1부.

5. 계약금액 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김웅		보도관리담당	代김웅		도로과장	송승익		건설교통국장	12/19
김석우
협조자	계약담당	代옥경민		재무과장	代김미경
시행	도로과-23189	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168	/	http://www.sb.go.kr
전화	02-2241-3582	/전송	02-2241-6561	/	toywoong@sb.go.kr	/	부분공개(7)