아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경시행에 따른 계약의뢰 [2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)]

우리사업소에서 시행중인「2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)]에 대하여 설계변경(2차) 계약을 아래와 같이 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 계 약 자 : 향일건설(주) 대표 정윤상

다. 계약기간 : 2022.06.27. ~ 2022.12.31.(총계약기간 2022.06.27.~2023.06.30.)

라. 공사개요

- 당초 : D13 ~ 500mm, L= 821m

- 변경 : D13 ~ 500mm, L= 1,033m

마. 설계변경 내역

							(단위 : 원)
구분		총부기금액		1차수 금액		2차수 금액	비고
계약금액	당초	***********		***********		***********
	변경	***********		***********		**********
	증감	*****		*************		*************

바. 설계변경 사유 : 계약물량 증·감에 따른 설계변경

사. 하자기간 : 준공검사일로부터 3년

아. 최대이행금액 : 600,000,000원

자. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(장기사용 배급수관(350mm이하)정비-22108)

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(배급수관 신설 및 연결-22104)

- 상수도사업비용, 영업비용, 급배수공사비, 신설공사비(급수공사-33201)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 개조공사비(급수공사-33201)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 지원사업성시설비(맨홀식 수도계량기 보호통

보온재 등 정비-22203)

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지비(원인자 이설공사 직접 시행-22209)

붙임 : 설계변경 관련문서 각 1부.  끝.

	급 수 운 영 과 장
주무관	손성우		급수운영팀장	이승우		급수운영과장	12/19
최춘근
협조자
시행	급수운영과-35566	(	2022. 12. 19.	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199, 강남수도사업소 (도곡동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-)3146-4845	/전송	02-3146-4889	/	sungwoo.son@seoul.go.kr	/	부분공개(5)