문서번호	급수운영과-38606
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장	강서수도사업소장
최형석	이연창	성기선	12/19
			신정철
협 조

설계변경 계획보고(제1회)

2022년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사 등)

2022. 12.

강서수도사업소

(급수운영과)

2022년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사,포장복구)

설계변경 계획보고(제1회)

「2022년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사,포장복구)」 과 관련 공사장별 건설폐기물의 물량 증감이 발생되어 이에 따른 설계변경을 시행하고자 보고 드림.

□ 용역현황

○ 용 역 명 : 2022년 강서수도사업소 관내 건설폐기물 처리용역(단위공사,포장복구)

○ 계약금액 : *******************

○ 계약일자 : 2022. 5. 27.

○ 용역기간 : 2022. 6. 03. ~ 2023. 6. 30.

○ 계 약 자 : ************

□ 설계변경 사유

○ 설계변경 근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제74조

• 설계변경으로 인한 계약금액 조정

- 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(예규 제77호)

• 제14장 용역계약 일반조건 제6절(과업내용의 변경과 계약금액 조정)

○ 설계변경 사유

- 공사장별 건설폐기물 운반 및 처리 물량증감에 따른 변경

• 물량증가 : 폐아스콘 처리, 운반 관련 4개 공종

• 물량감소 : 폐콘크리트 처리, 운반 관련 2개 공종

□ 설계변경 내용

○ 계약금액 및 차수별 부기금액 변경 내역

구 분	금 액		증 ․ 감	비 고 (공사기간)
	당 초	변 경
****	**********	**********	*
***	**********	**********	************	********* ************
***	*********	**********	************	********** ************

○ 주요 물량증감 내역

공 종	규 격	단 위	당 초	변 경	증 ․ 감
폐아스콘 운반	주간	㎥	397	925	증) 528
폐아스콘 운반	야간	㎥	617	167	감) 450
폐아스콘 처리(혼합)	-	톤	1,981	1,803	감) 178
콘크리트 처리	-	톤	76	201	증) 125

□ 조치계획

○ 설계변경 심의위원회 개최 후 설계변경계약 추진

- 상기 설계변경(연간단가)건에 대하여 우리사업소 자체 설계변경 심의위원회를 개최하여 심의결과에 따라 설계변경계약을 추진코자 함.

붙 임 : 건설폐기물 설계변경내역서 1부.  끝.