문서번호	급수운영과-35514
결재일자	2022. 12. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
손성우	이승우	12/19
		최춘근

설계변경(2차) 및 차수별 부기금액 변경 심의회 결과보고

[2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)]

2022. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(2차) 및 차수별 부기금액변경 심의회 결과보고

「2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)」관련 시공물량 변경 등에 따른 설계변경(2차)과 관련하여 아래와 같이 심의회를 개최하고 결과를 보고드림

Ⅰ		공 사 개 요

□ 공 사 명: 2022년 청담동 외 6개동 상수도공사(장기계속단가계약)

□ 계약기간: 2022.06.27. ∼ 2023.06.30.

□ 공사규모

○ 당초: D=13~500mm, L=821m

○ 변경: D=13~500mm, L=1,033m

□ 도 급 액: *************

□ 도 급 자: **************

Ⅱ		설계변경 사유

□ 시공물량 물량변경 등

○ 시공물량 변경[아스팔트 포장절단 외] 등

□ 설계변경 내역

(단위: 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	비 고
도 급 비	***********	***********	****
공 급 가 액	***********	***********	*
부가 가치세	**********	**********	*

Ⅲ		심의위원회 의견

□ 공 사 명: 2022년 청담동 외 6개동 상수도공사

□ 심의일시: 2022. 12. 16.(금) 14:00

□ 심의장소: 강남수도사업소 4층(급수운영과)

□ 심의의견: 설계변경 심의 의견을 아래와 같이 제시함

구 분	직 위	심의내용 및 결과		성 명	비고
		심의항목	심의결과
위원장	급수운영과장	물량변동 적정성	적정함	최춘근
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수운영팀장	물량변동 적정성	적정함	이승우
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	급수관리팀장	물량변동 적정성	적정함	전동근
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	시설운영팀장	물량변동 적정성	적정함	김진성
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성
위 원	안전관리팀장	물량변동 적정성	적정함	홍정식
		제경비 적정산정
		신규공정 적정성

Ⅳ		조 치 계 획

□ 상기 심의결과를 반영하여 설계변경을 시행하코자 합니다.

붙임  1. 심의의견서 1부.

2. 설계내역서[변경(2차)] 1부.

3. 차수별 부기금액 변경 내역서 1부.  끝.