문서번호	정수시설과-29542
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	암사아리수정수센터소장
박홍선	전훈	12/20
		代최재욱
협 조

2022년 암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사

설계변경(1차) 검토 보고

2022. 12.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

설계변경 검토 보고

(2022년 암사아리수정수센터 시설물 유지보수 공사)

2022년 암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사 시행중 현장여건 변경에 따른 신규공종 및 시공물량 증·감이 발생하여 검토 보고 드림.

□ 공사현황

□ 공사명: **************************

□ 공사개요: *********************************

□ 공사기간: ***************************

□ 계약금액: ************

□ 계약자: ************

□ 예산과목

상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비(토목건축시설물 유지관리)

□ 설계변경 내용 및 사유

□ 계약물량 변경

- 물량증가: 표면마무리 등 6개 공종

- 물량감소: 터파기(백호0.7㎡) 등 84개 공종

□ 신규공종 발생

- 콘크리트 맨홀 설치 등 65개 신규 공종 발생

□ 주요공종 변경내용

- 스테인리스 난간대 설치

∘ 1·2 취수장 계단 난간 설치

∘ 1·2 정수장 여과지 계단, 침전지·농축조·응집지·혼화지 난간대  난간출입문 설치

∘ 본부에서 배정된 작업장 안전설비 예산 활용

- 1정수장 착수정 이물질 유입방지망 설치

∘ 착수정 수로 난간 및 상부 덮개 낙엽 유입 방지망 제작설치

- 기타 공정 소규모 물량 변경 및 제잡비 정산

□ 계약금액 변경 예정내역

(단위: 원)

구분		당초	변경	증·감
도급액	1차	***********	***********	***********
	2차	***********	***********
	계	***********	***********	***********

□ 조치계획

□ 설계변경계약 증가액 ***********원은 아래 예산을 활용하고자 합니다.

(단위: 원)

구분	예산액
본부 생산부 포괄예산	***********
작업장 안전설비 관리 잔여예산	***********
2022년 암사아리수정수센터 시설물 유지보수공사 낙찰차액	**********
암사아리수정수센터 펌프장 작업통로 안전난간설치공사 낙찰차액	*********
계	***********

□ 본부(안전조사과) 설계변경 심사완료 후 설계변경 시행 예정

붙임  1. 설계변경 내역서 각 1부

2. 산업안전관리비 각 1부

3. 제비율 검증확인서 1부

4. 산업안전보건관리비 검토결과서 1부.  끝.