의원 요구 자료 제출

시 행	토목부-37033
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
접수번호
접수일자
수 신 자	수신자 참조
수신자	서 울 특 별 시 장(기획담당관), 총무부장

주무관		토목총괄과장	토목부장	시설국장	도시기반시설본부장	결재
조재근		김동철	하현석	권완택	12/20
					김성보
협 조
	주무관				박형재
	주무관				이현국

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 4544번, 황희 의원, 외교통일위원회)

따로붙임 :      국회의원 요구자료 1부.  끝.

황희 의원(외교통일위원회, 더불어민주당)

□ 월드컵대교 개통 일정에 관한 자료요구

○ 질의 요지

1. 입안부터 현재까지 월드컵대교 램프 D,H 건설에 따른 진행상황 전체

2. 개통 시기가 2023년 12월로 지연된 사유

- 지시공문 등 근거자료 일체 첨부하여 제출

1. 월드컵대교 건설공사관련 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1) 입안부터 현재까지 월드컵대교 램프D,H 건설에 따른 진행상황 전체

□ 사업개요

○ 위    치 : 영등포구 양평동 ~ 마포구 상암동

○ 규    모 : 폭 31.4m(왕복 6차로), 연장 1.98km

- 북단연결로 6개소(L=4,257m), 남단연결로 8개소(L=4,252m)

※ Ramp-D(B=7m, L=346m), Ramp-H(B=6.7m, L=263m)

○ 공사기간 : '10. 3. ~ '24. 2.

○ 총사업비 : 4,553억원

□ 추진실적 (공정률 : 92%)

○ '10. 3. : 공사 착공

○ '14.12. : 수상구간 교각(15기) 시공 완료

○ '17.12. : 북단 연결로(4개소) 개통, 주탑 및 PSC 거더부 시공

○ '18.12. : 사장교 주탑 시공 완료

○ '21. 9. : 본선 및 주요 연결로 개통(9.1)

○ '22.12(현재). : 안양천구간(Ramp-D,H) 상하부 구조물 공사중

Ramp-D(공항대로→월드컵대교) ․‘18.09 : 시의원 설치요구 ․‘18.11 : 자문회의 개최(시의원 및 강서구 의견 수용) ․‘19.10 : 최종 노선 확정	Ramp-H(안양천로→월드컵대교) ․‘18.12 : 국회의원, 시의원 설치요구 ․‘19.03 : 하천점용허가 관련 협의 (국토관리청) ․‘19.10 : 최종 노선 확정

□ 향후계획

○ '23.  6. : 남단 연결로 Ramp-B 개통

○ '23.12. : 남단 연결로 Ramp-D,H 개통

※ 부분개통 평면도

	공용중
	미개통

2) 개통 시기가 2023년 12월로 지연된 사유

○ 풍수해 기간 안양천 내 공사 제한에 따른 사업 기간 조정

- 하천점용허가 당시 200년 빈도를 기준으로 가교 및 가축도로 인한 안양천의 수위상승 등의 영향이 극히 작은 것으로 검토되었으며,  이를 근거로 풍수해 기간 내 계속 공사추진을 하고자 하였음

- 22년 수방기간중 안양천 관리부서의 가교 및 가축도 철거 요구로 인해 철거 및 재설치등 안양천 내 공사가 제한되어 사업 기간 조정함.

따로붙임 : 사업계획변경 보고서 1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	도시기반시설본부 (토목부)	담당사무관	김동철
	☎ 6348-2114	주무관	조재근
	작 성 일 : 2022. 12.