문서번호	토목부-36952
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이승주		한병찬	12/20
			하현석
협조
	주무관		도제경

실정보고(관급자재 수급방법 변경) 검토보고

[신림공영차고지(저류조포함) 조성공사]

2022. 12.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사 -

실정보고(관급자재 수급방법 변경) 검토 보고

『신림공영차고지(저류조포함) 조성공사』에 소요되는 관급자재(레미콘) 수급방법  변경에 대한 실정보고 검토보고임

[관련근거] 실정보고(관급자재(레미콘) 구매방식 변경) [신림차고지(감)제2022-291호( '22.12.13.)]

Ⅰ		사 업 개 요

□ 위    치 : 관악구 신림동 140-2 일대

□ 규    모 : 차고지(버스 101대), 빗물저류조(35,000㎥)

□ 기    간 : 2018.10.01. ~ 2023.12.31.(4차 2022.1.1.~12.31.)

□ 공 사 비 : 38,183백만원(4차 4,000백만원)

□ 시 공 사 : ㈜서우건영 외 2개사 / 감 리 단 : ㈜제일엔지니어링 외 2개사

Ⅱ		보 고 내 용

○ 최근 발생한 오봉역 인명사고(11.5.) 및 화물연대 파업(11.24.~12.9.) 사태 등으로 시멘트 및 레미콘 공급이 제한되어, 콘크리트 타설 공정이 지연됨에 따라 공기 및 품질·안전관리에 지장을 초래하고 있은 실정임

※ 현재 레미콘 공급이 점차 회복되고 있으나 민간 건설현장 위주로 공급되고 있는 상황으로 정상화까지는 1~2개월 소요될 것으로 추정

○ 관급자재인 레미콘의 수급방법을 사급으로 변경하여 공정 지연을 최소화하고 거푸집 장기간 외기 노출로 인한 거푸집 및 콘크리트 노출면 변형 등 품질·안전관리 문제를 해소코자 함

Ⅲ		검 토 내 용

□ 실정보고 검토

○ 레미콘 타설구간 현황

***************************************************************************************************************************************************************************************************************

○ 레미콘 단가 검토                                            (단위:원/㎥)

*************************************************************************************************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************

□ 공사비 검토

○ 공사비 증·감 현황

************************************************************************************************************************************************

- 예산조치 계획

• 총사업비(97,431백만원) 범위내에서 시행 가능

• 신림공영차고지 건설사업 추진계획 변경 보고[버스정책과-359814('22.8.5.)]

Ⅳ		조 치 의 견

○ 관급자재(레미콘) 공급 불안정으로 인한 공정 지연 및 품질·안전관리에 지장을 초래하여 소요자재의 수급 방법을 변경(관급→사급)하고자 하는 사항으로 책임건설사업관리기술인의 검토의견과 같이 적정한 것으로 판단되므로 원활한 공정추진을 위하여 실정보고를 승인하고 설계변경 자문회의(소위원회) 후 설계변경 시행코자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.