문서번호	기전과-32431
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/20
		代박신범
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

2022. 12. 20.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 중 교통안전시설물 설치공사 (신호, 표지) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 수서역 교통안전시설물 설치 관련자료 보완제출 및 승인요청

ㅇ **************************************

□ 수서역(통합대합실) 교통안전시설물 설치 관련 변경사항 송부

ㅇ **************************************

□ [삼성~동탄 제2공구] 교통안전시설물 설치공사 기한연장 요청

ㅇ *************************************

□ 삼성-동탄 광역급행철도 제2공구 공사 중 최종(완료) 교통 처리계획 통보(수서)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-6925호(2022.04.01.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사 중 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)

□ 공사위치 : 강남구 수서동 728

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******	********	*****	********

표 지	******	********	********	********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************	******
감 리 사 (표지)	********	**********
설계변경 (신호)	************	************	**************

□ 변경사유 : 토목공사 지연으로 인한 준공기한 연기 및 규제심의 누락분 추가에 따른 설계변경

Ⅳ		검토 의견

□ 원인자부담공사 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리 하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서(변경) 1부.

4. 설계도면(변경) 1부.  끝.