실정보고(조경) 검토결과(제2자유로 종점부 입체화 공사 )

공사명

제2자유로 종점부 입체화 공사

공사개요

◦위치: 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리 일대

◦규모: 지하차도 신설(폭4차로, 연장 540m),

월드컵로 확장

- 조경: 가로수, 띠녹지, 지하차도 상부 식재 등

◦공사기간:‘19.8.1~‘22.12.31

◦도 급 비: 56,069백만원

- 조경: 1,121백만원

※ 공정률 : 90.5%(조경 34.2%)

◦시공사 : 삼부토건(주)외 2

◦감리단 : 동부엔지니어링(주)외2

◦설계사 : ㈜유신 외 3

보고 건명

난지천공원 주차장 진출입로 추가 지장수목 처리 실정보고 승인 요청

보고 배경

◦저촉수목 추가 발생에 따른 관리청 의견 반영 요청

※ 근거 : 방재시설부-31875호(2022.12.15.)

보고요지

◦월드컵로 선형 변경에 따라 월드컵공원(난지천공원) 주차장 진출입로가 변경되면서 추가 발생한 지장수목 처리

건설사업

관리단

검토의견

◦주차장 진출입로 위치와 규모가 변경되었으며 유관기관 협의 의견에 따라

처리하는 것으로 타당함.

변경내용

물량

증가

◦변경 내역

구 분	규격	단위	당초	변경	증·감(△)	비고
지장수목이식	3종	주	-	4	4
	R20	주	-	2	2
	R25	주	-	1	1
	R30	주	-	1	1
지장수목폐기	3종	주		5	5
	R20	주	-	1	1
	R32	주	-	3	3
	R40	주	-	1	1

사업비

변경

********************************

[단위: 천원]

구 분	당 초	변 경	증·감(△)	비고
*****	*	*****	*****
*****	*	*****	*****
*****	*	***	***
*****	*	*****	*****

- 기존비목 : 계약단가 적용

사업비

**************되나 수용 가능(주무부서 실무협의 완료)

행정절차

설계변경 반영

공기영향

영향 없음

처리의견

◦ 사업계획 변경(주차장 진출입로 변경)으로 지장 수목 발생이 불가피하고, 관리청인 서부여가센터 협의 의견 반영하여 수목 처리하는 것으로 변경에 따른 사유 및 내용, 규모가 적정한 것으로 판단됨.

비 고

따로 붙임 : 실정보고서(제2자유입건 제2022-469호(2022.12.19.))

결재

주무관

이은국

조경시설과장

오성훈

방재시설부장

12/20

이동훈