아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서 울 특 별 시
수신	관리단속과장
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행 및 의뢰(정릉천2복개구조물 보수공사)

1. 시설보수과–27997(2022.12.19.)호 설계변경(정산) 보고와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『정릉천2복개구조물 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 정릉천2복개구조물 보수공사

나. 공사기간 : 2022.06.24 ~ 2023.01.19

다. 도 급 비 : **************

라. 공사개요 : 단면보수 2,968㎡, 철근노출단면보수 803㎡, 부대공 1식

마. 도 급 자 : 케이엘지건설(주) 대표 김익호

바. 감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

사. 변경사유 : 물량 증·감 및 정산

아. 변경내역

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비		*************	*************	**************
도 급 비	공급가액	*************	*************	*************
	부가가치세	***********	***********	**************
	계	*************	*************	**************
관 급 비		*	*	*
이 전 비		**********	*	*************

자. 예산과목

- 안전총괄실 도로시설과, 도로시설관리, 하천복개구조물관리, 정릉천2복개 보수, 시설비및부대비(시설비).

붙임  1. 설계변경(정산) 보고 방침 1부.

2. 설계변경(정산) 관련서류 각 1부.

3. 검증확인서(정릉천2복개 구조물 보수공사)

4. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 보 수 과 장
주무관	김영현		시설보수과장	12/20
이화신
협조자	관리단속과장	이우승
시행	시설보수과-28002	(	2022. 12. 20.	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913, 북부도로사업소 (번동)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-944-5453	/전송	02-945-5073	/	kyh2908@seoul.go.kr	/	부분공개(5)