문서번호	기전과-32198
결재일자	2022. 12. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김헌경		김은덕	12/15
			임대운
협조

『2022년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

설계변경(2회) 검토보고

2022.  12. 15. (목)

동부도로사업소

(기전과)

『2022년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

설계변경(2회) 검토보고

우리 사업소에서 시행중인「2022년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)」와 관련 감리업체로부터 제출된 설계변경  요청사항에 대하여 검토하고 보고드림

1		관련근거

□ 2022년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가) 2차 설계변경 제출건

ㅇ (주)주현이앤씨 주현(동부)2022-75호(2022.12.14.)

2		사업개요

□ 사 업 명 : 2022년 동부 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

□ 사업내용 : 강남구 외 3개구 교통신호기 신설 및 개량

□ 사업기간 : 2022. 3. 22. ~ 12. 31.

□ 계 약 자 : 길갈전기 대표 전호필

□ 계약금액 : ******************************

□ 감리업체 : ㈜주현이앤씨 대표 이정수

3		설계변경 내용

□ 설계변경 사유

ㅇ 경찰서 규제 및 현장 여건에 맞추어 실투입 물량으로 변경

ㅇ 노후 교통신호지주 및 시각장애인용 음향신호기 교체

ㅇ 건강, 연금보험료 등 제경비 정산

□ 주요변경 내역

순번	공 종		단위	수량		변 경 사 유	비고
				당초	변경
*	***************	**	*	*	*	*.당초 계약물량과 작업지시 및 현장여건에 따른 공사 물량 변경.
*	**********************	**	*	*	*
*	*************	***	*	*	*
*	**************	**	*	*	*
*	***********************	**	*	*	*
*	************************	**	*	*	**
*	*******************	**	*	*	**
*	************************	**	*	**	**
*	***************	**	*	*	**
**	******************	**	*	*	**
**	****************	**	*	*	**
**	*************	**	**	*	**
**	*************************	**	*	*	*
**	*************************	**	*	*	**
**	*************************	**	*	*	**
**	***************	**	*	*	*
**	***************	**	*	*	*
**	***************	**	*	*	*
**	***************	**	*	*	**
**	***************	**	*	**	**

순번	공 종		단위	수량		변 경 사 유	비고
				당초	변경
**	****************	**	*	*	*	*.당초 계약물량과 작업지시 및 현장여건에 따른 공사 물량 변경.
**	****************	**	*	*	*
**	**********************	**	*	*	*
**	**********************	**	*	*	**
**	****************************	**	*	***	***
**	***************************	**	*	**	***
**	***************************	**	*	***	***
**	***************************	**	*	**	***
**	***************************	**	*	**	**
**	***************************	**	*	**	**
**	***************************	**	*	**	**
**	******************	**	*	**	***
**	********************	**	*	*	**
**	*********************	**	*	**	**
**	*********************	**	*	**	***
**	*************************	**	*	**	***
**	****************************	**	*	*	**
**	**********	**	*	**	***
**	**************	**	*	*	**
**	************************	**	**	*	*
**	************************	**	**	*	**
**	***********************	**	**	**	***
**	**********************	**	**	**	**
**	***************************	**	*	*	***
**	***********************	**	*	*	**

□ 제경비 정산

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감		비 고
*****	*************	**********	*	*********
*****	**********	**********	*	*******
*****	**********	**	*	*********
*****	**********	**	*	*********
****	***********	***********	*	*********
*********	**********	**********	*	*********
*******	**********	**	*	*********
*********	********	**	*	*******

□ 설계변경 금액

구 분		공 사 금 액		증 , 감	비 고
		변 경 전	변 경 후
* * *	****	***********	***********	**************	**** ****
	*****	**********	**********	**************
	*	***********	***********	**************

□ 감리원 검토의견

◦ 현장여건에 적정하도록 수정, 보완하여 당초 사업에 맞게 변경하여 시공하는 것이 사업목적에 부합되고 타당하다 판단되어 물량변경 및 제경비 정산(예정)을 반영하여 설계변경 요청

4		보고자 의견

□ 감리사 설계변경 요청사항을 검토한 결과 설계변경 요청이 적정한 것으로 판단되어 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

붙임 : 1. 설계변경 요청 공문 1부.

2. 설계변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.