문서번호	토목부-36985
결재일자	2022. 12. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	토목설계과장	토목부장	시설국장
김현중	김상익	代김동철	전결 12/20
			권완택

설계단계 건설사업관리 용역 발주계획

≪동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사≫

2022. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	■	□
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	■	□
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	■	□
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	■	□
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	■	□	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	■	□	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	■	□
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	■	□
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	■	□
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	■	□
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	■	□

설계단계 건설사업관리 용역 발주계획

≪동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사≫

“동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사”추진에 따른 공사시행 요청(도로계획과) 및 건설기술진흥법 시행령 제57조에 의거 효율적인 설계업무 수행을 위한 설계단계 건설사업관리용역을 시행하고자 함

※ 관련근거 : 도로계획과-22268(2022. 5. 16.) 공사 시행요청

1		추진배경 및 근거

ㅇ 공사 시행 요청(도로계획과 → 토목부, 2022. 5. 16.)

- 동부간선도로 지하화 구간인 영동대로 일대의 기본설계 기술제안입찰 공사 시행에 따라 실시설계 적격자 선정 및 원활한 사업추진을 위한 전문 공종별 설계 내실화를 위한 설계단계 건설사업관리 시행

ㅇ 우리 시(市) 사회기반시설 건설에 따른 설계 적정성 검토 등 기본설계 기술제안입찰공사의 설계단계부터 종합적인 건설사업관리 필요

- 본 사업은 한강을 통과하는 민자터널과 연계하여 지하도로(재정터널)를 건설하여 영동대로의 교통 지·정체를 해소하기 위한 사업으로

- 장래 서울시의 중요 사회기반시설에 대한 면밀한 설계 검토 등 사업관리가 중요

	<관련근거 법령>
⏵ 건설기술진흥법 시행령 제57조(건설사업관리 대상 설계용역) - 1종시설물 및 2종시설물 건설공사의 기본설계 및 실시설계용역 - 총공사비가 300억원 이상인 건설공사의 기본설계 및 실시설계용역

2		사업개요 및 추진경위

□ 사업개요

ㅇ 위    치: 강남구 영동대로 일대(영동대로 남단 ~ 학여울역 사거리)

ㅇ 규    모: 지하터널, 본선 2.1km(편도 2차로), 연결로 0.88km

- 출입시설 1개소(대치IC), 영동대로 지상구간 차로 확장 9 → 11차로

ㅇ 사업기간: 2012. ~ 2029.

- 설계단계 건설사업관리(′22. 12. ~ ′23. 9. 예정) / 공사(′23. 1. ~ ′29. 6. 예정)

ㅇ 총공사비: 3,848억 원(시설비 3,643억 원, 감리비 205억 원)

ㅇ 위 치 도

□ 주요 추진경위

ㅇ ′12. 2.	: 동부간선도로 지하화 상세 기본계획 수립

ㅇ ′20. 10. ~ ′22. 5.	: 기본설계(도로계획과)

ㅇ ′22. 5. 16.	: 공사시행 요청(도로계획과 → 토목부)

ㅇ ′22. 8. 12.	: 시설공사 입찰공고(조달청)

- 기본설계 기술제안입찰공사 기술제안서 작성 및 우선시공분 실시설계 중

ㅇ ′22. 12. 21.	: 입찰서 제출(예정)

3		설계단계 건설사업관리 용역 시행계획

□ 발주개요

ㅇ 용 역 명 : 동부간선도로 지하화(영동대로) 건설공사 설계단계 건설사업관리

ㅇ 용 역 비 : ******

ㅇ 과업기간 : **********

ㅇ 과업내용 : 설계단계 건설사업관리 업무 수행(붙임 과업내용서 참조)

ㅇ 입찰방법 : 일반공개경쟁입찰

ㅇ 선정절차 : 사업수행능력평가(PQ) 후 가격입찰

※ 관련근거 : 건설기술진흥법 시행규칙 제28조 제2항(건설엔지니어링사업자 선정)

① 입찰공고 → ② 사업수행능력(PQ) 평가서 접수 및 평가 → ③ 입찰참가 적격자 통보 → ④ 가격입찰 → ⑤ 낙찰자 선정 → ⑥ 계약체결

ㅇ 설계단계 건설사업관리 기술자 구성(안)

						책임건설사업관리기술인
						도로 및 공항 또는 토목구조
도로및공항 (2인)			토목구조 (2인)			토질·지질 (2인)			교통 (2인)			건축 (2인)			기계 (2인)			전기 (2인)				소방 (2인)			정보통신 (2인)
특급(1인)			특급(1인)			특급(1인)			특급(1인)			특급(1인)			특급(1인)			특급(1인)				특급(1인)			특급(1인)
고급(2인)			고급(1인)			고급(1인)			고급(1인)			고급(1인)			고급(1인)			고급(1인)				고급(1인)			고급(1인)
												조경 (1인)			※ 추후 참여기술인 평가와 관련한 실적인정 기준 및 범위 등 별도 검토
												고급(1인)

□ 입찰참가자격

ㅇ 분야별 분담비율(공사비 보할기준)

***	****	****	****	****
******	*******	******	******	******

※ 효율적인 사업관리를 위해 4개 전문분야로 구분하여 입찰참가자격 부여

ㅇ 입찰참가자격

**********

***************************************************************************************

**********

************************************************************************

**************************************************************

***********

***********************************************************

****************************************************

***********

****************************************************************************************

□ 입찰참가 적격자 선정 : 사업수행실적평가(PQ)

ㅇ 평가 절차 및 기준

*****************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************

□ 낙찰자 결정 기준 : 기술용역 적격심사

*******************************************

************************************************************************

*****************************************************************************

****************************************************************************************************

□ 계약체결 방법 : 공동도급(공동, 분담, 혼합방식)

***************************************

*****************************************************************************

**************************************************************************

**************************************************************************

4		행정사항

ㅇ 월활한 설계단계 건설사업관리 수행을 위한 전문분야별 업무지원

- 토목부 : 실시설계 건설사업관리 전반에 대한 관리·감독

- 건축부 : 터널 관리사무소, 환기소, 캐노피 건축 등

- 설비부

(기계분야) 터널 내 환기설비, 소화설비, 피난시설, 자동제어설비, 배수펌프 등

(전기분야) 전력공급 계통, 조명시설, 비상경보, 유도등, 비상콘센트 등

(통신분야) CCTV 유·무선 통신설비, ITS 등

(소방분야) 소화전, 제연설비, 비상조명 등

- 방재시설부 : IC, 관리사무소 부지 등 조경 식재 계획

5		향후계획

ㅇ ′22. 12. : 사전절차 이행

- 기술용역 타당성심사, 사업수행능력 세부평가기준 협의, 건설기술심의(용역발주 심의), 일상감사 등

ㅇ ′23. 1. : 용역발주, 계약 및 착수

붙임  1. 설계 내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 건설사업관리기술인 투입 계획(안) 1부.  끝.