아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경(총차 2회, 1차 최종) 시행에 따른 변경계약 의뢰 [염창나들목 리모델링 공사]

우리 부서에 추진중인『염창나들목 리모델링 공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차 2회, 1차 최종)에 따른 변경계약 의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 염창나들목 리모델링 공사

나. 공사기간 : (총차) 2021년 9월 8일 ~ 2023년 6월 30일

(1차) 2021년 9월 8일 ~ 2022년 12월 31일

다. 계약금액 : ********************

********************

라. 계 약 자 : ****************

마. 설계변경

○ 사유

- 현장 실정보고에 따른 물량변경 및 신규공종 발생

- 1차 공사 준공에 따른 국민연금보험 등 보험료 실 납입금액 정산

- 1, 2차간 계약물량 조정 등

○ 계약금액 변경

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증·감	비 고
***	**	*************	*************	*************
	**	***********	*************	*************

바. 예산과목 : 한강공원 이용 및 생태환경 개선, 한강 접근체계 개선, 한강공원 나들목 증설 및 개선, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경(총차1회, 1차 최종) 시행 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서(총차1회, 1차 최종) 각 1부.

3. 제비율 검증 각 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

	시 설 부 장
주무관	김태규		치수과장	代이성연		시설부장	12/20
박상보
협조자	주무관	안미희		기획예산과장	김영창		총무과장	代유문선
총무부장	송영민
시행	치수과-25421	(	2022. 12. 20.	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0651	/전송	02-3780-0744	/	mgsilang@seoul.go.kr	/	부분공개(5)