문서번호	시설보수과-28054
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
주무관	시설보수과장
민병하	12/21
	이화신

「녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사 용역」 설계변경(정산) 검토 보고

2022. 12.

북부도로사업소

(시설보수과)

『녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사 용역』

『녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사 용역』과 관련, 점검장비 물량 조정 및 안전관리비 사후정산에 따른 설계변경(정산)을 아래와 같이 검토 보고 드림.

설계변경(정산) 검토 보고

용역개요

○ 용 역 명 : 녹천교 등 14개시설 정밀안전점검 및 실태조사 용역

○ 용역규모 : 녹천교 등 14개 시설

○ 용역기간 : 2022. 6. 10. ~ 2023. 2. 4.

○ 계약금액 : 금285,413,000원

○ 계 약 자 : ㈜한국구조물안전연구원 김대호, ㈜우인엔지니어링 박원호

보고내용

○ 설계변경(정산) 내역

- 녹천교 등 교량 점검장비 미사용에 따른 대가조정

연번	교 량 명	공 종	물 량		비고
			당초	변경
1	녹천교	고소작업차	1대	-
2	방학교	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
3	우이3교	고소작업차	1대	-
4	도봉1교	고소작업차	1대	-
5	세검1교	굴절차	1대	-
6	배오개다리	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
7	새벽다리	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
8	나래교	굴절차	1대	-
		싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-

연번	교 량 명	공 종	물 량		비고
			당초	변경
9	버들다리	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
10	오간수교	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
11	맑은내다리	굴절차	1대	-
		싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
12	영도교	싸인보드카	1대	-
		교통안전시설	1식	-
13	빨래골교	고소작업차	1대	-

○ 설계변경금액

- 당초 : 금285,413,000원 → 변경 : 금277,478,000원(감 7,935,000원)

조치계획

○ 상기 보고내용과 같이 설계변경(정산) 시행하고자 함.

붙임  설계변경 내역서 1부.  끝.