문서번호	총무과-30350
결재일자	2022. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	총무과장	한성백제박물관장
민흥기	윤희숙	임석진	12/21
			유병하
협 조
	주무관		윤수희
	주무관		이지영
	주무관		김동현

백제집자리 유구보호각 증·개축공사 설계용역

준공 검토 보고

2022. 12.

한성백제박물관

(총 무 과)

백제집자리 유구보호각 증·개축공사 설계용역

준공 검토 보고

백제집자리 유구보호각 증·개축공사 설계용역의 준공에 대한 검토 보고를 드림.

용역 개요

◦ 용 역 명 : 백제집자리 유구보호각 증·개축공사 기본 및 실시설계

◦ 계약업체 : (주)연경당건축(대표 김성은)

◦ 계약금액 : 금130,761,900원

◦ 용역기간 : 2022. 4. 28. ~ 2022. 12. 15.

◦ 설계내용 : 기존 1층 670㎡ → 991㎡(개축 670㎡, 증축 321㎡)

사업비 산출(용역결과)

❍ 사 업 비(용역결과)                                      (단위:천원)

구 분	사업비	공사비	전시공사비	발굴조사비	감리비	비고
금 액	*********	*********	*******	******	******

※ 문화재청 설계승인 요청(2022.12.12.) → 보완에 따른 공사비 증가 가능

❍ 기존 사업비 : *****************

******************************************

❍ 문화재청 요청(2022.11.11) 사업비 : **************************

***********************************************

❍ 사업비 변경 사유

- 2023년 사업비 요청시 개산견적에 따른 과다산출에 따라 실시설계시 내역 및 물량 등 조정(건축법에 따른 증축 면적 조정 및 소방 조정 등)

- 공사비 40억 미만에 따른 비상주감리 적용

그간 추진사항

❍ ’20.11.09. : 백제집자리전시관 보수 및 개선계획 수립

❍ ’21.03.10. : 백제집자리 유구보호각 정비사업 추진계획 수립

❍ ’21.04.~ 09. : 백제집자리 유구보호각 정비 및 활용에 대한 기본계획 수립용역 시행 및 자문보고회 운영

❍ ’22.02.16. : 백제집자리 유구보호각 증·개축공사 기본 및 실시설계 용역 추진계획 수립

❍ ’22.04.28. : 기본 및 실시설계용역 계약체결

*********************************

*************************************

❍ ’22.05.12. : 착수보고회 개최

*************************************************************************************************

❍ ’22.08.09. : 중간보고회 개최

***************************************

*******************************************

**************************

❍ ’22.10.13. : 디자인자문(최종) 보고회 개최

************************************************************************

********************************************************

****************************

❍ ’22.11.10 : 송파구 건축경관 심의(조건부통과)

*************************

*****************************************

*********************

❍ ’22.11.11 : 사업예산 문화재청 예산 요청(2023년 문화재 수리)

❍ ’22.12.12 : 문화재청 설계 승인 요청(수리기술과)

향후 계획

❍ '23. 1월  : 송파구 건축허가 협의 및 서울시 계약심사

❍ '23.      : 공사 발주 및 준공(2023년 문화재청 예산 교부시)

붙임  1. 사업비산출서(용역준공) 1부.

2. 총괄원가계산서 1부.

3. 감리용역비 1부.  끝.

4. 설계내역서_준공 1부.