문서번호	기전과-32562
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/22
		代이영일
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(신호)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(신호)」

2022. 12. 22.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(신호) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 원인자부담공사 준공기한 외 변경승인 요청[서울 위례지구 택지 전기 및 교통신호등공사(3공구)]

ㅇ *********************************

□ 경찰서 교통안전시설심의 결과 통보 (송파 3차)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-20361호(2022.08.23.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 위례신도시 택지개발사업 제3공구 교통안전시설물 설치공사(신호)

□ 공사위치 : 송파구 위례신도시 제3공구

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******	********	*****

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************
규제심의	29299호('16.10.13.) 10371호('17.04.18.) 22147호('18.09.05.) 10530호('19.04.30.) 26943호('19.10.28.) 21660호('20.10.26.) 17232호('21.08.05.) 21141호('21.09.28.)	20361호('22.08.23.) 추가	서울특별시경찰청 교통관리과

□ 변경사유 : 규제심의 추가로 인한 준공기한 연기 및 설계변경

Ⅳ		검토 의견

□ 원인자부담공사 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류(별첨) 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서(변경) 1부.

4. 설계도면(변경) 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.