문서번호	치수과-24546
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	비공개(5)
방침번호	부구청장 제677호

주무관		치수팀장		치수과장	안전건설교통국장		부구청장
이은찬		문철		민병기	신용철		전결 12/22
							유보화
협조
	기획재정국장		이현식
	재무과장		김영규
	계약팀장		홍혜영

설계변경(정산) 검토 보고[2022년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약) ]

「2022년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(정산) 검토 보고

2022. 12.

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 [√] 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 [ ] 공약(약속)사업 [ ] 계속사업 [√] 인센티브/공모사업 [ ]
소통·갈등분야 고려사항		●	구민			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	전문가			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	이해당사자			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등발생요인			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	갈등 예방/해소 대책			:	유 [ ] ( ) 무 [√]
여성친화 도시		성평등 [ ] 안전·편의 [ ] 가족·공동체회복 [ ] 여성참여 [ ]
아동친화 도시		아동권리 보장(생존권·보호권·발달권·참여권) [ ] 아동 의견수렴 및 반영 [ ]
기타 고려사항		일자리 [ ] 환경영향 [ ] 안전 [ ] 유지비용 [ ] 바른 공공언어 [ ]
		성인지 [ ] 취약계층 [ ] 장애인 [ ] 디자인 [ ] 공직선거법 [ ]
타자원 활용		●	중앙부처	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	서울시	:	유 [√]( 시비, 시기금 ) 무 [√]
		●	기업	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
		●	민간단체	:	유 [ ] ( ) 무 [√]
구민의견 수렴		●	방법	:	설문조사 [ ] 만족도 조사 [ ] 찬반투표 [ ] 기타 [ ]
		●	시기	:	시행 전 [ ] 시행 중 [ ] 시행 후 [ ]
언론홍보 계획		기획보도 [ ] 보도자료 [√] SDTV [ ] 뉴스레터 [ ] 성동구소식지 [ ]
		기고문 [ ] 전자행정서비스 [ ] SNS [ ] 기타(리플릿 등) [ ] 없음 [ ]
	● 홍 보 제 목:
	● 중점 홍보사항
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

「2022년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)」

설계변경(정산) 검토 보고

『2022년 하수관로 준설(물청소) 공사(단가계약)』의 공사물량 증·감 및 제경비 정산 등 에 대한 설계변경(정산) 보고임.

□ 공사 개요

○ 공 사 명: 2022년 하수관로 준설(물청소)공사(단가계약)

○ 기    간: 2022.3.25.(착공 3.28.)~2022.12.31.

○ 위    치: 관내 전지역

○ 내    용: 하수관로 준설 6,349㎥ 세정준설 134,830m

○ 총사업비: 2,948백만원(시비 852, 시기금 930, 구비 966, 구기금 200)

- 도급비: 2,720,872,420원

○ 도 급 사: (주)정선토건 대표 오유미

□ 설계변경(정산) 보고

○ 실 시공물량 및 제경비 정산

- 기 보고된 긴급준설비 및 낙찰차액을 사용하여 추진한 준설물량에 대해 공종별 실 시공물량 반영[치수과-23031호(2022.11.29.)]

- 4대 보험 및 고용개선지원비 등 제경비 정산 반영

○ 공사비 증·감 내역

구 분	당 초	변 경	증 ㆍ 감
총공사비	2,843,872,420	3,098,000,000	증 254,127,580
도 급 비	2,720,872,420	2,935,263,000	증 214,390,580
이 전 비	123,000,000	162,737,000	증 39,737,000

○ 주요 물량 증·감 내역

구 분	공 종	단위	수 량		비 고
			당초	변경
준 설	수로암거준설(진공흡입차 7.64㎥)	㎥	921	1,024	증 103
	흡입준설(진공흡입차 7.64㎥)	㎥	1,460	1,625	증 165
물청소 (세정)	하수관 세정(흡입세정차 7.64㎥)	m	130,000	173,796	증 43,796
	하수관 세정(흡입세정차 3㎥)	m	4,830	1,282	감 3,548

□ 조치 계획

○ 상기 내용과 같이 공종별 물량 증·감 등에 대하여 설계변경(정산) 시행하고, 준공코자 함.

붙임  1. 변경내역서 1부.

2. 제비율검증확인서 1부.

3. 일상감사의견서 1부.

4. 관련 공문 1부.  끝.