아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰-제2자유로 종점부 입체화 공사 건설폐기물처리용역

1. 토목부-36238호(2022.12.22)와 관련입니다.

2. 우리부에서 추진중인 「제2자유로 종점부 입체화 공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사 건설폐기물처리용역

나. 도 급 비 : 금623,216,000원(금육억이천삼백이십일만육천원)

다. 용역기간 : 2019.10. 7.~2022.12.30(장기계속 3차 – 2021.12. 1 ~ 2022.12.30.)

가) 준공기한 연기 내역

① 총차 2019.10. 7.~2022. 12.30→2019.10. 7.~2023. 3.31(증 91일)

② 3 차 2021.12. 1.~2022. 12.30→2021.12. 1.~2023. 3.31(증 91일)

나) 귀    책 : 도시기반시설본부

다) 지체상금 : 미부과

라) 연기사유 : 붙임 의뢰서 참조

라. 도 급 사 : ㈜한진산업

마. 예산과목 : 도로계획과, 도로건설, 간선도로망 확충(교통사업특별회계), 제2자유로 종점부(난지도길)입체화(교통개선분담금 계정), 시설비

붙임 1. 공기연장 검토보고서 각 1부.

2. 용역기간 연장요청 건설사업관리단 공문 1부.

3. 합의각서  1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	토 목 부 장
주무관	박희정		토목총괄과장	김동철		토목부장	12/22
代김동철
협조자	주무관	조재근
시행	토목부-37297	(	2022. 12. 22.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 12층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-8662	/전송	02-3708-2599	/	parkoran@seoul.go.kr	/	부분공개(5)