문서번호	건축부-35412
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	의료시설과장	건축부장		시설국장
여명현	정채문	代정채문		12/22
				권완택
협 조

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

총차 및 2차 계약변경(공사기간 연장) 검토보고

2022. 12.

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

「광역소공인 특화지원센터 건립공사」

총차 및 2차 계약변경(공사기간 연장) 검토보고

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』관련 건설사업관리단으로부터  공사기간 연장(총자 및 2차) 요청서가 제출되어 검토 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」제22조, 같은 법 시행령 제75조 및 시행규칙 제74조

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」제14장 용역계약 일반조건, 제7절 계약이행의 지체와 계약의 해제·해지, 2.계약기간의 연장

○ ********************************

Ⅱ		공 사 개 요

○ 공 사 명: 광역소공인 특화지원센터 건립공사(장기2차)

○ 위    치: 성동구 성수동2가 277-34

○ 규    모: 지하2층~지상7층, 연면적 2,711.51㎡

○ 기    간: 2020.06.30. ~ 2022.12.26.

○ 시공/감리: 세이브건설(주)외 2/(주)포스코에이앤씨건축사무소외 1

○ 계약현황

*****	**************	*******	***
***	*************	*************************
***	*************	*************************	***
***	4,591,375,000	*************************	***

Ⅲ		주 요 경 위

○ ′20.06.30.: 공사 착공

○ ′21.09.06.: 1차수 공사 준공

○ ‘21.09.07.: 2차수 공사 착공

○ ‘22.11.28.: 공사기간 연장*************************

○ ‘22.12.20.: **********************************

○ ‘22.12.20.: ***************************

○ ‘22.12.현재: ********************

Ⅳ		계약변경 내용

○ 공사기간 조정

구 분	변경 전	변경 후	비 고
***	*************************	*************************	******
***	*************************	*************************	******

○ 공사기간 조정 사유

********************************

**************************************************

**************************************)

***************************************************************

**********************************************

************************************************************************************************************

*********************************************************

○ 계약금액: ****

*****************************

○ 지체상금 부과여부: ****

Ⅴ		검 토 의 견

○ **************

- **********************************************************************************************************************

○ *********

- *********************************** *****************************************

붙임: ********************************

2*************************************

3**********

4*******************  끝.