문서번호	토목부-37238
결재일자	2022. 12. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
박희정		김동철	12/22
			하현석
협조
	주무관		조재근

(제2자유로 종점부 입체화 공사)

건설폐기물처리용역 기간 조정 검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

제2자유로 종점부 입체화 공사

건설폐기물처리용역 기간 조정 검토 보고

본 사업의 사업기간이 조정됨(’22.12.31→’23.03.31)에 따라 건설폐기물 처리용역 사업 기간도 조정하여 공백없이 현장 내 건설폐기물에 대하여 처리 및 관리하고자 함.

□ 용역 개요

ㅇ 용 역 명 : 제2자유로 종점부 입체화 공사 건설폐기물처리용역

ㅇ 규    모 : 건설폐기물 처리 및 운반(폐콘크리트 5,974톤, 폐아스콘 16,859톤)

ㅇ 도 급 비 : 623,216천원

ㅇ 용역기간 :＇19.10.07 ~＇22.12.30 (3차 :＇21.12. 1 ~＇22.12.30)

ㅇ 용 역 사 : ㈜한진산업  대표 김상현

□ 보고 내용(제2자유입건 제2022-480호 요약)

**********************************************************************************************************.

****************************************************************

***************************************************************

□ 계약금액 조정

ㅇ 총차                                               (단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감(△)
계		***********	***********	*
용역비	공 급 가 액	***********	***********	*
	부 가 세	**********	**********	*
	소 계	***********	***********	*

- 용역 기간 조정 : ****************************************************

ㅇ 3차                                                 (단위 : 원)

구 분		금 액			비고
		당 초	변 경	증 ․ 감(△)
계		***********	***********	*
도급비	공 급 가 액	***********	***********	*
	부 가 세	**********	**********	*
	소 계	***********	***********	*

- 용역 기간 조정 : ****************************************************

□ 조치계획

ㅇ 건설공사 업무수행지침 제67조(설계변경 관리)에 따라 계약금액 조정사항을 승인처리 하며 계약업무 등 후속 절차를 이행하고자 함.

붙임  건설사업관리단 공문 1부.   끝.