문서번호	토목부-37424
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
박희정		김동철	12/23
			代김동철
협조
	주무관		조재근

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 유출지하수 처리방안 검토보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 유출지하수 처리방안 검토보고

지하차도 공사시 발생되는 유출지하수의 처리방안을 당초(소규모환경영향평가) 폐수처리시설 설치관리에서 하수관로 배출로 변경에 대한 책임건설사업관리기술인의 검토의견을 보고드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

○ 규    모

- 지하차도 신설(폭 4차로, 연장 540m)

- 도로확폭(양방향 각 1개 차로, 총연장 582m)

○ 총사업비 : 56,069백만원(도급비 49,970, 관급비 6,099)

○ 공사기간 : '19.8.1 ~ '22.12.31

○ 시공사: 삼부토건(주), 감리사: 동부엔지니어링

□ 건설사업관리단 보고내용(제2자유입건 제2022-484호, `22.12.23.)

○ 실정보고 사유

- **************************************************************************

*********************************************************************************************

*****************

***********************************************************************

***********************************************************************

○ 유출지하수 처리방안 비교검토

< 비교검토(안) >

구 분	검토1안	검토2안	비고
처리개요	************ *********** *************** **************	*********** ***************
공사비(천원)	********* ******************	********
채택안	*	*

○ 배출기간 및 사용료 검토

- 시작일은 수도사업소 청구일, 종료일은 준공일 기준, 추후 실처리기간으로 정산

구 분		내 용	비 고
****	**	**********	*
	**	**********	*
	**	****	*******
*****	**	************	****************** *************************
	**	********	*****

○ 공사비 검토                                       (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제요율 적용제외공종	-	******	******	14개월
*************	-	*	*
공 급 가 액	-	******	******
부 가 세	-	*****	*****
도 급 비	-	******	******

□ 검토의견

*********************************************************************************************************

**********************************************************************************************************************************************************************

**************************************************************************************

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 건에 대한 책임건설사업기술인의 검토 의견이 타당하다고 판단되어 유출 지하수 처리방안에 대하여 승인처리하고, 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업기술인 검토의견서 1부.  끝.