문서번호	건축부-35490
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설계과장	건축부장
오종근		홍순명	12/23
			代정채문
협조
	공공사업팀장		소영수

『잠실종합운동장 주경기장 리모델링(학생체육관신축 포함)』

문화재 표본조사 관련 기술인력 배치변경 실정보고 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 12.

도시기반시설본부

【시설국 건축부】

『잠실종합운동장 주경기장 리모델링공사(학생체육관신축 포함)』

문화재 표본조사 관련 기술인력 배치변경 실정보고 검토보고

Ⅰ		사 업 개 요

□ 위    치 : 송파구 올림픽로25일대

□ 지역지구 : 제1종일반주거지역, 지구단위계획구역, 도시계획시설(체육시설)

□ 건축규모 : ***************************

******************************************

***********************************************

***********************************************

*******************************************************

□ 사 업 비 : ********************************************

□ 설 계 자 : ㈜나우동인건축 컨소시엄(삼우종합건축, NBBJ)

□ 건설사업관리자 : ㈜펨코엔지니어링건축사사무소외 4개사

□ 사업기간 :*******************

Ⅱ		추 진 경 위

□  ’20.  1. 15 : 설계용역착수(동남권사업과)

□  ’21.  4. 26 : 기본설계완료 통보(동남권사업과→도시기반시설본부)

□  ’21.  8. 23 : 건설사업관리용역 착수(도시기반시설본부)

□  ’22.  1. 14. : ******************************

□  ’22.  6.  8. : 실시설계일정 조치요청(도기본→동남권사업과)

□  ’22.  6. 10. : 기본설계 확정도서 송부(동남권사업과→도기본)

□  ’22.  9.  2. : ******************************

□  ’22.12월현재 : 실시설계도서검토 및 인허가·각종 인증 진행중

Ⅲ		실정보고사항

□ 관련근거

○ 잠실주경기장 리모델링 문화재표본조사 관련 감리배치 요청【동남권추진단-2471('22.11.15.)】

: ************************************************************************청

○ 문화재표본조사 관련 기술인력 배치 변경 실정보고【건설사업관리단 PC22-1314('22.12.22.)】

□ 실정보고 내용

○ 인력투입계획 : 기존 토목분야 설계관리 기술인이 공사관리 겸임

분야	등급	성명	변경전	변경후				증감	비고
			설계관리	설계관리	공사관리	소계	적용
**	**	***	**	**	*** ********************	***	***	*****

○ 용역비(투입량) 검토내용

구분	변경전	변경후	증감	비고
총용역금액	***************	***************	*************
투입수량(인·월)	**************** ***************** ***************** *****************	**************** ***************** ***************** *****************	************* *************** ********* *********
용역기간	*********************	**	******* *********************

Ⅳ		처 리 의 견

□ 매장문화재 표본조사를 위한 굴토공사기간 중 ************************************************하여 실정보고 승인하고 추후 계약변경 절차를 거쳐 변경계약코자 합니다.

첨부  1. 동남권추진단 공문 1부.

2. 건설사업관리단 실정보고 공문 1부.

3. 건설사업관리단 기술검토의견서 1부.

4. 배치표 및 내역서 1부.  끝.