문서번호	토목부-37390
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목총괄과장	토목부장
박희정		김동철	12/23
			代김동철
협조
	주무관		조재근

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 중앙파일 절단부 처리방안 검토보고

2022.12.

도시기반시설본부

(토 목 부)

(제2자유로 종점부(난지도길) 입체화 공사)

지하차도 중앙파일 절단부 처리방안 검토보고

지하차도 BOX 및 U-Type구간(시·종점)의 중앙파일 절단부 처리방안에 대한 적정성에 대한 검토의견을 보고드림

□ 사업개요

○ 위    치 : 마포구 상암동 월드컵경기장 사거리

○ 규    모

- 지하차도 신설(폭 4차로, 연장 540m)

- 도로확폭(양방향 각 1개 차로, 총연장 582m)

○ 총공사비 : 56,069백만원(공사비 49,970, 관급비 6,099)

○ 공사기간 : '19.8.1 ~ '22.12.31

○ 시공사: 삼부토건(주), 감리사: 동부엔지니어링

□ 건설사업관리단 보고내용(제2자유입건 제2022-482호, `22.12.23.)

○ 실정보고 사유

******************************************************************************

****************************************************************************************************************************

○ 설계현황

< 기초 및 상부슬래브 중앙파일 절단부 현황 >

구 분		U-type(시・종점)	Box-type	비 고
지하차도 중앙파일 절단부		<상세도> 설계 미반영		******* ******** ******** ******** ********
상부 슬래브	상단	-	처리계획 설계 미반영	-
	하단	-	처리계획 설계 미반영	******** *****
*******		*******************	*******************	****** ********

○ 중앙파일 절단부 처리방안

***************************************************

*******************

**********************************************************

**********************************************

구 분	단면도	평면도	비 고
기초 및 상부 슬래브 (상단)			① U-type 시점 - 기초슬래브(상단) 80개소 ② Box-type - 상부슬래브(상단) 243개소 - 기초슬래브(상단) 243개소 ③ U-type 종점 - 기초슬래브(상단) 85개소

구분	U-type 시점부(80개소)					Box-type(486개소,상부+기초)										U-type 종점부(85개소)
	4BL	5BL	6BL	7BL	8BL	9BL	10BL	11BL	12BL	13BL	암거	14BL	15BL	16BL	17BL	18BL	19BL	20BL	21BL	22BL
좌	7	8	9	8	8	8	11	11	13	25	13	12	13	11	8	9	8	9	8	9
우	7	8	9	8	8	8	11	11	14	17	13	12	13	11	8	9	8	9	8	8

*************************

*******************************************************

구 분	모식도	상부슬래브(하단) 절단부 개소
지하차도 BOX 상부슬래브 (하단)		구분	9BL	10BL	11BL	12BL	13BL	암거	14BL	15BL	16BL	17BL	합계
		좌	8	11	11	13	25	13	12	13	11	8	125
		우	8	11	11	14	17	13	12	13	11	8	118
			16	22	22	27	42	26	24	26	22	16	243

3) 상부슬래브(하단) 절단부 대체공법 선정

구 분	당 초	1안	2안
개요도
시공방법	-	◦ 앵커로 철망고정 후 우레탄 채움 → 표면 평삭 → 접착제 혼합한 시멘트를 표면에 드라이비트 표면마감	◦ 세트앵커로 철판 고정 → 일반 몰탈 채움
장 점	-	◦ 기존 콘크리트표면과 유사색상마감 가능 ◦ 시공속도 빠름	◦ 일반몰탈 사용 ◦ 세트앵커, 아연도금철판을 사용하므로 탈락방지 가능
단 점	-	◦ 우레탄 색상관리 요구 (접착제 혼합시멘트를 드라이 비트하여 단점 보완 가능)	◦ 아연도금 철판제작 공정이 별도 필요
경제성	-	42백만원	66백만원
추 천	*	*	*
결 론	********************************************** **************************************************

○ 수량 변경 현황 및 신규단가 검토

< 수량 증,감 >

공 종 명	규 격	단위	당초	변경	증⦁(-감)	비 고
*******
*******
*****	********	**	*	***	***
*******	*************	**	*	***	***	***********
***********	*************	**	*	***	***	*********
*****	*****	*	*	***	***

< 신규단가 검토 >

(단위 : 원)

공 종 명	규 격	단위	설계단가	적용단가	비 고
*******	*************	**	******	******

**************************************

*****************************************************

(단위 : 원)

공 종 명	규 격	단 위	견적단가			적용단가	비 고
			1업체	2업체	3업체
*********	*************	***	*******	*******	*******	*******

************************************

○ 공사비 검토                                       (단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
**********	-	******	******
*************	-	*****	*****
**********	-	******	******
***********	-	*****	*****
***********	-	******	******

□ 검토의견

*************************************************************************************************************

************************************************

*********************************************************************************************************************

□ 조치계획

○ 상기 실정보고 건에 대한 책임건설사업기술인의 검토 의견이 타당하다고 판단되어 지하차도 중앙파일 절단부에 대한 처리방안에 대하여 승인처리하고, 추후 설계변경 시 반영 조치코자 함.

붙임 : 책임건설사업기술인 검토의견서 1부.  끝.