문서번호	방재시설부-32322
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경시설과장	방재시설부장
송종흔		오열상	12/23
			代최진우
협조
	조경시설과장		오성훈

동절기 공사중지 검토 보고

2022. 12.

도시기반시설본부

(방 재 시 설 부)

동절기 공사중지 검토 보고

『난지물재생센터 환경개선사업』와 관련하여 동절기 품질저하 등 시공사 공사 중지 요청에 대한  검토 보고임

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 난지물재생센터 환경개선사업

□ 공사기간 : '17. 8.18.~'23.10.08.(2차'19. 1.19.~'23.10.08.)

□ 규    모 : 구내도로 설치(B=7m, L=1.25km), 탈취기 기초 설치

□ 도 급 비 : 14,082백만원(2차 5,175백만원)

□ 시 공 사 : (주)고려디앤엘(대표계약자) 외 2(공동 및 분담이행방식)

□ 건설사업관리용역사업자 : (주)한국종합기술 외 2

Ⅱ		추진현황

□ '17. 8.18. : 환경개선사업(토목, 건축, 조경) 착공

□ '17. 9.28. : 공사 중지(1차)

□ '17.11. 3. : 공사 재개(탈취기 기초 및 배관)

□ '17.12.27. : 공사 중지(2차)

□ '18. 3.15. : 공사 재개

□ '18.11.20. : 공사 중지(3차)

□ '19.01.18. : 2차분 계약

□ '20. 6.19. : 사업계획 변경 통보(물재생시설과→도기본)

□ '21. 2. 5. : 도로계획 변경 통보(물재생시설과→도기본)

□ '21. 5.26. : 공사 재개(도로일부 기층포장 및 탈취기 기초)

□ '21.10.14. : 공사 중지(4차)

□ '22. 6.21. : 도로계획 변경 알림(물재생시설과→도기본)

□ '22. 9. ~10. : 실시계획변경인가 및 행위허가 승인

□ '22.11.21. : 공사 재개(수목 제거 및 이식)

□ '22.12.22. : 공사 중지 요청(시공사 → 도기본)

Ⅲ		보고내용

□ 동절기 공사 중지 검토

○ 중지기간 : ’22.12.26. ~ ’23. 2.23.(60일)

○ 중지사유

- 수목제거와 일부 이식이 완료되어 후속 공정인 토공을 시행하여야 하나

- 기온저하로 인해 노체 및 노상 재료의 동결 우려, 아스팔트 콘크리트

포장공사시 품질확보 곤란

○ 책임건설사업관리기술인 의견

- 공사시방서, 관련지침 검토결과 동절기 토공사와 포장공사시 품질저하가 우려되는 등 실질적 공사시행이 어려운 실정으로 공사중지가 타당함

Ⅳ		보고자 의견

□ 동절기 기온저하로 구내도로 개설을 위한 토공사 및 포장

공사시 품질저하 등 책임건설사업관리기술인의 검토의견이

타당한 것으로 판단되며

□ 기온저하로 인한 실질적인 공사시행이 어려운 실정으로,공사장 안전조치 및 간접비 등 추가비용 발생하지 않도록 공사중지   조치하고 중지기간 건설사업관리기술자는 투입계획 조정(철수)

붙임  감리단 검토 보고 1부 끝.