문서번호	시설과-2000
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설과장
이우진	代김성득	12/23
		이정환
협 조

『주차장 시설 개선사업 전기공사』

최종 결과 보고

2022. 12.

중부공원여가센터

(시  설  과)

『주차장 시설 개선사업 전기공사』

최종 결과 보고

「주차장 시설 개선사업 전기공사」를 완료하고 최종 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		공사 개요

□ 공 사 명 : 주차장 시설 개선사업 전기공사

□ 공사개요 : 배관·배선공사, 분전반 신규 설치

□ 공사기간 : 2022. 12. 06 ~ 2022. 12. 25.

**********************************************

□ 공 사 비

구 분		준공금액(원)	주요 사용 내역	비고
총 공 사 비		**********
도급비	공급가액	**********	- ******* - ***********	-
	부 가 세	*********
	합 계	**********
관 급 비		*********	************	********
이 설 비		*******	**********

Ⅱ		추진 현황

□ 2022. 11.08. :「낙산 및 용산가족공원」노후 주차 정산시스템 정비계획

[시설과 -1188(2022.11.08.)]

□ 2022. 11.24. : 관급자재구매[시설과-1419(2022.11.24.)]

□ 2022. 12.02. : 공사시행 [시설과-1611(2022.12.2.)]

□ 2022. 12.06. : 전기공사 계약체결[공원운영과-6124(2022.12.7.)]

□ 2022. 12.06. : 공사착공

□ 2022. 12.19. : 공사준공

Ⅲ		주요 공사 현황

□ 주요 공사 내용

○ 주차장 시설 개선사업 전기공사

- 배관·배선공사, 분전반 신규 설치 등

□ 현장 작업사진

○ 붙임 사진대지 참조

Ⅳ		개선 효과

□ 서울시 지갑없는 주차장을 통해 비대면·무정차 자동결재 및 서울시       통합 주차정보 안내시스템 연동으로 주차가능대수 정보서비스 제공       등 입·출차 시간을 단축을 통한 편의성 및 운영 효율성 증대

붙 임  1. 노후 주차 정산시스템 정비 계획(낙산 및 용산가족공원) 1부.

2. 공사시행『주차장 시설 개선사업 전기공사』 1부.

3. 조달물품구매『주차장 개선사업 전기공사 관급자재 구매』 1부.

4. 물품검사(수)조서[주차장 개선사업 전기공사 관급자재 구매] 1부.

5. 준공검사(감독)조서-주차장 개선사업 전기공사 1부.

6. 공사대장-주차장 시설 개선사업 전기공사 1부.  끝.