문서번호	도로보수과-29957
결재일자	2022. 12. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장
최선보	전결 12/23
	代주영진

「2022년 교통안전시설 정비공사 건설사업관리용역(강서)」  설계변경 검토 보고(제1회-최종)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022.  12.

강서도로사업소

도로보수과

「2022년 교통안전시설 정비공사 건설사업관리용역(강서)」

설계변경 검토 보고(제1회-최종)

우리 사업소에서 시행하는『2022년 교통안전시설 정비공사 건설사업관리용역(강서)』에 대하여 감리사부터 설계변경 검토서가 접수되어 아래와 같이 설계변경사항을 검토하여 보고 드림

※ 관련문서 : 제1회(최종) 설계변경 검토보고〔㈜건양 22-545(2022.12.22.)〕

1		공사개요

❍ 공 사 명 : 2022년 교통안전시설 정비공사 건설사업관리용역(강서)

❍ 공사규모 : 노면표시 및 교통안전표지 설치 감리용역

❍ 공사기간 : 2022.4.13. ~ 2022.12.24.

❍ 용 역 비 : 87,245,000원

❍ 감 리 사 : ㈜건양엔지니어링 대표 김종문

❍ 예산과목

- **************************************************************

2		설계변경사항

❍ 노면표시 및 교통안전표지 공사수행에 따른 실 근무일 반영

- 2022년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 및 교통안전표지 설치 및 유지보수공사에 대한 감독, 설계변경, 준공검사에 따른 실 근무일 반영

❍ 변경내역

공 종	구분	당 초	변 경	증감
중급기술자	**	***	***	****
중급기술자	************	**	**	****
중급기술자	************	*	*	****
초급기술자	**	***	***	****
초급기술자	************	**	**	****
초급기술자	************	*	*	****
차량운행비	**	***	***	****

❍ 공사비 증·감 내역                                    (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증감액
총용역비	**********	**********	*********
순공사원가	**********	**********	*********
부가가치세	*********	*********	*********
손해배상보험료	*******	*******	*

3		조치계획

❍ 상기 내용과 같이 건설사업관리용역 실 근무일에 따른 용역비를 감액하여 설계변경 후 정산 처리하고자 함.

붙임 1. 감리사 최종 설계변경 공문 1부.

2. 설계(변경)내역서 1부.  끝.