문서번호	정수과-26563
결재일자	2022. 12. 26.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규		김종희	12/26
			代김종희
협 조
	안전관리팀장			신왕근
	주무관			석원회
	주무관			성민제
	주무관			최필규
	주무관			진정선

안전하고 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

‘22년 정수시설 청소용역 2차 (최종)정산 및 변경계약 계획

2022.12

광암아리수정수센터

(정수과)

2022년 정수시설 청소용역 2차(최종)완료 및 변경계약 계획

『2022 광암아리수정수센터 청소용역』에 대한 2차 청소작업(최종)이 완료되어

보험료 및 혼화지보수공사 사후정산에 따른 계약변경을 실시후 아래와

같이 준공처리하고자 함

Ⅰ		청소용역 개요

□ 용 역 명    : 2022년 광암아리수정수센터 정수시설 청소용역

□ 용역기간   : 2022. 3.21 ~ 2022. 12. 31

□ 용역내용   : 정수지 등 주벽청소(175,133㎡), 침전지 슬러지청소(2,821㎥)

□ 도 급 비  : 181,804,00원

□ 도 급 자  :  주식회사 청광

Ⅱ		2차 청소용역 확인 점검 결과

□ 점검대상 : 2차청소 정산물량

□ 청소기간 : 2022. 9.15. ~ 12.21

○ 청소일자 세부내역

혼화지및 침전지	1-1지	1-2지	2-1지	2-2지	3-1지	3-2지
청소 일자	12.13,12.21	10.14,1017~10.18	12.9~10	11.2~3	12.5~12.6	9.19,10.1,10.2
침전지 대수로 및여과지	여과지1계열		여과지 2계열		여과지 3계열
	1~4지	5~8지	1~4지	5~8지	1~4지	5~8지
청소 일자	11.17	10.19	11.15	11.4	11.16	10.4
혼화지	12.13	혼화지보수공사	12.10	혼화지보수공사	12.6	혼화지보수공사
정수지	6지	7지	8지	9지	10지
청소 일자	10.6 (물이송 3일)	10.13 (물이송 3일)	10.20 (물이송3일)	9.20 (물이송3일)	9/29 (물이송3일)
활성탄흡착지	바닥청소	망청소	1지,10지	6지.2지	4지.8지	3지,9지
청소일자	12.2	8.24	11.28	11.29	11.30	12.1
활성탄흡착지	5지.7지	고도처리 회수조	1지	2지
청소일자	12.2	청소일자	11.21

□ 점검방법 : 청소상태 및 주변정리 여부 등

연번	점 검 위 치	작 업 내 용	청소 적정성	비 고
1	혼화지 및 침전지	청소 및 슬러지 제거	적 정	“
2	여과지 및 대수로	벽체 청소	적 정	“
3	활성탄흡착지	바닥 청소	적 정	“
4	정수지	벽체 청소	적 정	“
5	고도처리 회수조	바닥 청소	적 정	“

□ 점검결과 : 정수시설청소용역 확인결과 작업지시 내용과 같이 적정

하게 완료되어 전반적으로 청소상태 양호함.

○ 점검사진

침전지 청소 점검	정수지 청소 점검

Ⅲ		청소용역 준공물량 현황

공 종	규 격	단위	청소용역 물량			합계	청소내용
			계약	1차기성	2차기성
정수지	물사용	㎡	66,424	36,203	30,221	66,424	2차기성 사진
침전지	물사용	㎡	53,176	26,588	26,588	53,176	〃
기타정수시설물 (혼화지,여과지 등)	물사용	㎡	55,533	26,256	29,175	55,431	〃
슬러지청소		㎥	2,821	1,515	1,301.5	2,816.5	〃
밸브개폐		개소	142	82	60	142
펌프설치 및 해체		개소	48	26	22	48
고압호스 설치		m	330	165	165	330
배선설치 및 철거		m	670	335	335	670
혼화지 양수작업		시간	24	12	12	24
가설창고		식	0.75	0.75	0	0.75

Ⅳ		2차 기성금(준공금액)정산 내역

***		***	**			**** **	** ** ***
			*******	******* *********	******* ****
** ** ** ** **	****	*****	*********	*********	*********	*********	*****
	****	*****	***********	**********	**********	***********	******
	***	**	*******	*******	*****	*******	*
		*****	*********	*******	*******	*********	*****
		*****	*********	*******	*******	*********	*****
		*****	*********	********	**	*	*********
		*****	*********	*******	**	*	*********
		******	*******	*******	**	*	*******
		*****	*********	*	*********	*********	*********
****************			***********	**********	**********	***********	**********
*********************			**********	*********	*********	**********	******
*********************			**********	*********	*********	**********	*********
***			***********	**********	**********	***********	**********
****			**********	*********	*********	**********	*********
****			***********	**********	**********	***********	**********

Ⅴ		조치계획

□ 보험료 실제 납부금액으로 보험료 정산, 혼화지 보수 공사으로 혼화지

6개지중 3개지만 청소실시(혼화지 1-1지.2-1지,3-1지) 정산,

정산금액(12,133,690원)

□ 변경계약금액 일억육천구백육십칠만삼백십원(169,670,310원)

□ 용역완료 현장에 대한 점검결과 청소상태가 양호하다고 판단되어

변경계약후 2차기성 최종 지급 예정

붙임 :  1. 변경 내역서 1부.  2. 변경내역서(청광) 1부. 3. 합의서   1부

4. 산업안전보건비 사용명세서   1부. 4. 4대보험료 납부확인서 1부.끝