아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	광암아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 시행(고도처리회수조 준설공사)

우리 정수센터에서 시행하고 있는『고도처리회수조 준설공사』에 대하여 아래와 같이 계약변경 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 고도처리회수조 준설 공사

나. 계약기간  : 2022.11.16 ~ 2023.01.05

다. 도 급 자 : ㈜태양엔지니어링 대표 권내율

라. 계약금액 변경내역

****	**	**	**	**
****	************	***********	***********

마. 계약변경사유 : 고도처리회수조 준설시 현장여건상(고도처리회수조 피트) 안전사고

우려로 일부 물량 준설 불가 정산, 산업안전보건관리비 정산

바.  예산과목   : 상수도사업비용,영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비(정수시설청소용역)

※2022.12.  . 감추산

붙 임 :1.정산시행보고서 1부. 2. 변경내역서 1부 3. 합의서 1부. 끝.

주무관	강석규		주무관	석원회		정수과장	12/26
김종희
협조자
시행	정수과-26566	(	2022. 12. 26.	)	접수		(		)
우	12989	경기도 하남시 서하남로 293, 광암아리수정수센터 정수과 (광암동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5347	/전송	02-3146-5309	/	ks344459@seoul.go.kr	/	부분공개(6)