아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(공사 준공기한 및 관급자재 납품기한 연장 알림)

1.업무지시현장 : 제2자유로 입체화 기계설비공사 주식회사 천일, 동부엔지니어링 주식회사

2.작 성 일 자 : 2022-12-27 16:12:13

3.지 시 내 용

가. 제2자유입건 2022-472(2022.12.20.)호와 관련입니다.

나. 제2자유로 입체화 기계설비공사 및 관급자재(수중펌프)의 준공(납품)기한이 붙임과 같이 연장되었음을 알려드리니,

구 분	계약기간		비 고
	당 초	변 경
기계공사	2021.10.06.~ 2022.12.30.	2021.10.06.~ 2023.03.31.	금액변경없음
관급자재	2022.05.02.~ 2022.12.30.	2022.05.02.~ 2023.03.31.

다. 잔여기간 동안 공정관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.  끝.

※ 본 기안은 결재 완료 시, One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관	이상록		도로설비과장	12/27
문학준
협조자
시행	설비부-35007	(	2022. 12. 27.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스15층	/	http://seoul.go.kr
전화	02-6438-2342	/전송	02-6438-2399	/	rock1975@seoul.go.kr	/	부분공개(5)