문서번호	기전과-32888
결재일자	2022. 12. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이석희		12/27
		김은덕
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「영동대로 지하공간 복합개발(2공구) 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「영동대로 지하공간 복합개발(2공구) 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)」

2022. 12. 27.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

영동대로 지하공간 복합개발(2공구) 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지) 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 영동대로 지하공간 복합개발 2공구 건설공사(토목) 관련 교통안전시설 설치공사 공사기간 연장 알림

ㅇ ****************************************

□ 영동대로 지하공간 복합개발 건설공사 공사중 교통소통대책 통보 (강남)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-11127호(2021.05.27.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 영동대로 지하공간 복합개발(2공구) 주변 교통안전시설물 설치공사(신호, 표지)

□ 공사위치 : 강남구 삼성동 111-8

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** **** *******	**********	********	********
표 지			**********	*********

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************	신 호
	*****************	*****************	표 지

□ 변경사유 : 교통처리계획 변경(신호) 및 토목공사 지연(표지)에 따른 준공기한 연기

Ⅳ		검토 의견

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.