문서번호	건축과-46985		주무관		공공건축담당	건축과장		도시관리국장
결재일자	2022. 12. 27.		한태웅		박정우	이승길		전결 12/27
공개여부	부분공개(5)							代고영룡
방침번호			협조
방침번호
				재활용담당			代조상대
				주무관			조상대

성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사 설계변경 검토보고

2022. 12.

건  축  과

(공공건축팀)

- 성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사 -

설계변경 검토보고

「성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사」와 관련하여 사업주관부서 요청으로 현장여건이 변경됨에 따라 설계변경 사항에 대한 검토결과를 보고하고자 함.

Ⅰ		공 사 개 요

□ 사 업 명 : 성북구 리앤업사이클플라자 신축 전기공사

□ 공사위치 : 성북구 화랑로 150(상월곡동 97-21 외 5필지)

□ 공사규모 : 지상2층, 연면적 476.83㎡

□ 시공/감리 : 일무이앤지주식회사 대표 김성경/(주)영진이앤씨 대표 임은옥

□ 도급금액 : 173,823,500원

□ 공사기간 : 2022.10.27.∼2023.2.3.

Ⅱ		처 리 근 거

□ 청소행정과-40262

「성북구 리앤업사이클플라자 건립 설계 및 공사시행 요청(변경)」

□ 건축과-46537

「설계변경 검토 지시_성북구 리앤업사이클플라자 신축공사」

□ 일무이앤지(주) 22-12-021

「설계변경 및 계약기간변경 요청의건」

□「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제13장 공사계약 일반조건

Ⅲ		설계변경 내용

□ 계약변경 예정 내용

(단위 : 천원)

당 초		변 경		증 감		비고
기 간	금 액	기 간	금 액	기 간	금 액
2022.10.14 ~ 2023.2.3.	173,823	2022.10.14 ~ 2023.6.30.	332,590	증) 147일	증)158,766

□ 설계변경 주요내용

(단위 : 천원)

구분	설계변경 내용	증감(천원)	비 고
전기공사	▷ 사업주관부서로부터 건축 2개층 추가(2층→4층)에 대한 요청에 따라 전기공사 물량 증가	증) 88,876	주관부서 요청사항
보험료 및 제경비		증) 69,890
소 계		증)158,766

□ 검토의견

〇 상기 사항을 검토한 결과 적정하다고 판단됨

Ⅳ		처 리 의 견

□ 시공사 보고사항 검토결과 타당한 것으로 판단되므로 위와 같이 승인하고

변경계약 시행하고자 함

붙임 : 1. 설계변경 공문 1부.

2. 내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검증확인서 1부.

4. 감리검토 의견서 1부.

5. 계약심사 결과 1부.  끝.