문서번호	생태환경과-24762
결재일자	2022. 12. 27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		생태환경과장	공원부장
양지정		현학범	12/27
			김상국
협 조

기본 및 실시설계 용역 준공·정산 검토결과

한강사업본부

(생태환경과)

기본 및 실시설계용역 준공·정산 검토결과

(망원한강공원 자연형 호안 복원사업 기본 및 실시설계용역)

｢망원한강공원 자연형 호안 복원사업 기본 및 실시설계용역｣의 성과품이 요구대로 납품된 바, 정산에 따라 55백만원 감액하여 준공처리하고자 함

1		용역개요

○ 용 역 명: 망원한강공원 자연형호안 복원사업 기본 및 실시설계용역

○ 사업위치: 망원한강공원(성산대교~홍제천, 서강대교~마포대교)/ 2Km

○ 용역기간: 2022. 3. 21. ~ 2022. 12. 15.

○ 계약금액: 195,922천원

○ 용 역 사: ㈜문창 대표 김명철

2		추진경위

○ 용역 발주                                           2022. 2. 14.

○ 용역 계약                                           2022. 3. 14.

○ 용역 착수                                           2022. 3. 21.

○ 착수보고회 개최                                     2022. 5. 11.

○ 설계보고 및 전문가 자문회의 개최                    2022. 9. 16.

○ 전문가 개별자문 실시                        2022. 9. 28 ~ 10. 12.

○ 중간보고                                           2022 .10 .20.

○ 업무지시(일부구간 토목공종 제외)                     2022. 11. 2.

○ 최종보고회(전문가 개별자문)                         2022. 12. 15.

※ 보고회 방침(생태환경과-24038., 2022. 11. 16.), 자문결과 별첨

○ 준공계 접수                                        2022. 12. 20.

※ 계약상의 준공기한(2022. 12. 15.)을 5일 도과

3		검토결과

□ 성과품 검토
○ 검 사 일: 2022. 12. 20.

○ 준공내용: 기본 및 실시설계용역 보고서 등 성과품

○ 검토결과: 적정

- 보고회 결과 및 자문의견이 충실히 반영되었고, 현장 구현을 위한 실시설계도면 등이 적정하게 마련된 것으로 인정됨

□ 계약금액 검토 : 55,447,450원 감액

○ 사유 : ① 과업범위 축소(2022. 11. 2.자 업무지시)
② 위 ①의 축소에 따른 직접경비, 보험료 정산
③ 계약기간 도과(5일)에 따른 지체상금

① 과업범위 축소 금액에 대한 검토

<금액조정 협의>

- 1차 협의(2022. 12. 21.)

· 우리본부   : 실시설계비 57,149,880원 감액 필요

· 계약상대자 : 실시설계비 34,017,753원 감액이 타당

- 2차 협의(2022. 12 .22.) ※ 협의 결과 : 결렬

· 우리본부   : 실시설계비 57,149,880원 감액 필요(동일금액)

· 계약상대자 : 실시설계비 34,017,753원 감액이 타당(동일금액)

**********>

*******************************************************************************************

**************************************************************************************************

※ 합의결과의 업무비중(보할)

	공 종	보할(%)	적용보할(%)			비고
			구분	홍제천 (40%)	마포대교 (60%)
1	기본설계	27.5	토목	85(9.35)	85(14.025)
			조경	15(1.65)	15(2.48)
2	실시설계	27.5	토목	85(9.35)	85(14.025)
			조경	15(1.65)	15(2.48)

-  제외금액 : 설계비 145,530,351 X 기본및실시설계 50%  X 제외구간 60%  X 토목공정 85%

= 145,530,351 X (14.025+14.025)% = 40,821,263원

② 직접경비, 보험비 정산 : 감 8,427,728원

- 직접경비 : 8,340,844원 감액(조감도 제외 상응 비용)

- 보 험 료 : 86,884원 감액(손해배상보험료 실비정산)

③ 지체상금 검토(도과 5일) : 감 1,273,500원

- 계산식 : 계약금액(195,922,950원) × 0.13% × 5일

□ 검토결과에 따른 준공금액

○ 최종 준공 금액

┎ 정   산 : 금 141,749,000원(지체상금 미계상)

┖ 최   종 : 금 140,475,500원(지체상금 계상)

○ 정산결과표

(단위 : 원)

구 분		공 사 비		감 액	비 고
		계약금액	정산금액
총 용 역 비		195,922,950	141,749,000	54,173,950
도급액	공급가액	178,111,773	128,862,782	49,248,991
	부가세	17,811,177	12,886,278	4,924,889
	합 계	195,922,950	141,749,000	54,173,950

4		조 치 의 견

○ 상기 검토결과에 따라 계약금액 조정 및 정산하고 준공하고자 함.

붙임 1. 준공계, 사진대지 1부.

2. 준공내역서 1부.

3. 최종보고회 결과(개별자문의견서) 각 1부(총 4부)

4. 업무지시전 1부.

5. 계약금액 조정 협의 내용(합의각서 포함) 1부.  끝.