아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
	동부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	「2022년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설 폐기물 처리용역」설계변경(1회) 시행 및 계약의뢰

우리 사업소에서 시행하고 있는「2022년 중랑, 동대문구 관내 상수도 단위공사장 건설 폐기물 처리용역」와 관련하여 아래와 같이 설계변경(1회) 시행 및 계약의뢰하고자 합니다.

1. 용역명: 2022년 중랑, 동대문 관내 상수도 단위공사장 건설 폐기물 처리용역

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
용역금액	42,292,000	52,712,000	10,420,000	물량증감

2. 계약자: 주식회사 베르원 대표 이기호

3. 용역기간: 2022. 7. 5. ~ 2023. 5. 31.

4. 설계변경 금액 내역

5. 변경사유: 공종별 시공물량 증·감, 단위공사장 현장 실정 변화에 따른

준공기한연기

6. 예산과목

가. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비

나. 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비, 장기사용 배급수관(350mm이하) 정비

붙임  1. 관련방침 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 설계변경 심의 의견서 및 사유서 1부.

4. 합의서 1부.  끝.

	행 정 지 원 과 장
주무관	최인혜		시설관리팀장	유광창		시설관리과장	이태형		동부수도사업소장	12/27
代김호남
협조자
시행	시설관리과-42649	(	2022. 12. 27.	)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13, 3층 시설관리과 (행당동)	/	https://arisu.seoul.go.kr/
전화	02-3146-2621	/전송	02-3146-2839	/	inhye10@seoul.go.kr	/	부분공개(5)