문서번호	급수운영과-36182
결재일자	2022. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
신중선	이승우	최춘근		12/28
				박기용
협 조
	주무관		차승현

준공기한 연기 검토 보고

(2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사)

2022. 12

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
일반사항
정책일반	◆ 제반 법규와 실태, 실제 현장의 의견 등을 검토하였습니까? (법령, 규칙, 통계·빅데이터, 시민의견 등)	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석하였습니까?(갈등, 약자, 일자리, 안전, 탄소 감축 등) ※ 약자 : 하단 세부 검토항목 점검	□	■
	◆ 정책·계획·전시물·홍보물 등이 역사적 사실에 부합하는지 검토하였습니까?	□	■
	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까?(경제·사회·환경 등)	□	■
약자와의 동행
목적	◆ 경제적으로 취약한 약자를 지원하기 위한 사업인가?	□	■
	◆ 주거, 생계, 의료, 교육, 기타 분야 중 어느 것에 해당하는가?	□	■	주거/생계/의료/교육/기타
	◆ 단순지원 사업과 사다리지원 사업 중 어느 것에 해당하는가? (단순 : 어려움 즉시 개선 / 사다리 : 계층 상향 또는 안정 유도)	□	■	단순지원/ 사다리지원
	◆ 경제적으로 취약한 약자가 아니라 하더라도, 다양한 분야의 사회적 약자를 배려할 수 있는 수단을 포함하였는가?	□	■
계획수립	◆ 사업 대상자가 쉽고 편리하게 서비스를 활용할 수 있도록 사업을 구성하였는가?	□	■
집행·홍보	◆ 집행과정에서 발생할 수 있는 역효과를 최소화하기 위한 대안을 고려하였는가?(‘약자’ 낙인효과, 역차별 등)	□	■
	◆ 사업 대상자에게 적절한 홍보 수단을 채택하였는가?	□	■
평가·환류	◆ 사업효과를 측정할 수 있는 지표(산출, 과정, 성과 등)는 마련하였는가? 아닐 경우, 성과를 평가할 수 있는 대체·보완 수단이 존재하는가?	□	■

준공기한 연기 검토 보고

「2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사」와 관련하여 공사감독처로부터 준공기한 연기 검토보고서가 접수되어 적정성 검토 후 준공기한을 연기하고자 함.

※ 관련문서 : 준공기한 연기 검토보고서 제출[공사감독2처-16513('22.12.27)]

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022년 테헤란로 장기사용 송배수관 정비공사

ㅇ 공사기간 : 2022. 6. 28 ~ 2023. 1. 23

ㅇ 공사규모 : D=150~800㎜  L=1,103m,  강관추진공 5개소

ㅇ 도 급 비 : ******************************

ㅇ 감 독 처 : 서울시설공단 공사감독2처

□ 공정현황

ㅇ 공 정 률 : 72% (2022.12.27 현재)

ㅇ 완료구간 : **************************

ㅇ 잔여구간 : **********************************

□ 준공기한 연기 검토(공사감독처)

ㅇ 준공기한 연기 사유

- *************************************

- ****************************************

- **********************************

ㅇ 준공기한 연기 : 158일

구 분	기 간
당 초	2022년 06월 28일 ~ 2023년 01월 23일
변 경	2022년 06월 28일 ~ 2023년 06월 30일

ㅇ 감독의견 : ********************************

□ 사업소 검토결과

ㅇ 준공기한 연기 사유의 타당성

- ****************************************************************************

- ************************************************************************************************************

※ ***************************************

ㅇ 귀책사유 : 발주처

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미부과

□ 조치의견

ㅇ 상기 검토결과를 반영하여 우리사업소 행정지원과에 준공기한 연기에 따른 변경계약 체결 의뢰하고,

ㅇ 변경계약 체결 결과를 공사감독처(서울시설공단)에 통보하여 공사관리에 철저를 기하도록 조치하고자 함.

붙  임 : 준공기한 연기 검토보고서 제출문 및 관련 서류 각 1부.  끝.