아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		성동도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 증액

우리 사업소에서 시행중인 『2022년 교량 및 고가차도 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종) 시행 및 변경계약을 의뢰하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2022년 교량 및 고가차도 일상유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2022. 01. 01. ~ 2022. 12. 31.(계약일 2022.01.01.)

다. 계약금액 : 금768,132,270원

라. 도 급 자 : ㈜오에이티엠엔씨  대표 권봉주

마. 설계변경사유 : 작업지시 결과 반영으로 인한 시공물량 변경

바. 설계변경내역

(단위:원)

구 분	금 액(원)		증 · 감
	당 초	변 경
총 공 사 비	948,132,270	1,091,509,860	증)143,377,590
도 급 비	768,132,270	942,183,000	증)174,050,730
관 급 비	180,000,000	149,326,860	감)30,673,140

사. 예산과목 : 성동도로사업소 시설보수과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물

일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 내역서 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 합의각서 1부.

4. 계약금액조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	김수천		시설보수과장	12/28
김시련
협조자
시행	시설보수과-26369	(	2022. 12. 28.	)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41, 용답동	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1552	/전송	02-2210-1562	/	suc1004@seoul.go.kr	/	부분공개(5)