현장중심! 민생중심! 더불어 행복한 성북
		성 북 구
수신자		내부결재
(경유)
제목	성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사 설계변경 시행

우리구에서 추진중인『성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명: 성북구 리앤업사이클 플라자 신축 전기공사

나. 계 약 자: 일무이앤지주식회사 대표 김성경

다. 변경사항

1) 계약금액

가) 변경전: 금173,823,500원(금일억칠천삼백팔십이만삼천오백원)

나) 변경후: 금332,590,000원(금삼억삼천이백오십구만원)

다) 증/감액: 금158,766,500원(금일억오천팔백칠십육만육천오백원)

2) 계약기간

가) 변경전: 2022.10.14. ~ 2023.2.3.

나) 변경후: 2022.10.14. ~ 2023.6.30.

다) 증/감: 증 147일

라. 변경사유: 설계변경에 따른 계약금액 및 계약기간 조정

마. 예산과목: 친환경적 청소시스템 구축, 자원의 절약 및 재활용, 서울형 리앤업사이클플라자 건립, 시설비및부대비, 시설비

붙임  1) 설계변경 보고서          1부.

2) 변경계약의뢰서           1부.

3) 설계변경 내역서          1부.

4) 계약심사 결과            1부.

5) 감리 검토보고서          1부.

6) 계약금액 조정 검증확인서 1부.  끝.

주무관	한태웅		공공건축담당	박정우		건축과장	이승길		도시관리국장	전결 12/28
代고영룡
협조자	주무관	조상대		재활용담당	代조상대		계약담당	신정경
재무과장	代김미경
시행	건축과-47113	(	2022. 12. 28.	)	접수		(		)
우	02848	서울특별시 성북구 보문로 168(삼선동5가)	/	https://www.sb.go.kr/
전화	02-2241-2925	/전송	02-2241-6547	/	xodnd0758@sb.go.kr	/	부분공개(5)