문서번호	도시계획과-32521
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		보행일상권조성팀장	도시계획과장
한인지		장길홍	12/29
			김용학
협조	주무관		안동호
	주무관		김가영

’22년도 3·4분기 40개소 지역생활권계획 실행방안

중점관리사업 추진실적 점검 결과 보고

2022. 12.

도시계획과

(보행일상권조성팀)

’22년도 3·4분기 40개소 지역생활권계획 실행방안

중점관리사업 추진실적 점검 결과 보고

기수립된 40개소 지역생활권계획 실행방안 內 중점관리사업의 ’22년도 3·4분기 추진실적을 점검하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상: 120개 중점관리사업(40개 지역생활권)

ㅇ 점검기간: ’22. 11. 10. ~ 12. 27.

ㅇ 점검방법

- (자치구) 중점관리사업 관리카드 작성 및 제출

- (서울시) 관리카드 내 중점관리사업별 추진실적 점검 및 검토

ㅇ 점검내용: 중점관리사업별 추진현황 및 특이사항 등

□ 추진 경위

ㅇ 단계별 지역생활권계획 실행방안 수립 및 중점관리사업 발굴 완료 이후, 분기별로 중점관리사업 추진실적 점검 시행

구분	수립시점	대상 지역생활권	중점관리사업	점검 시행 시기
시범단계	'19. 5. / '19. 10.	5개소	28개	’20. 6. 이후
2단계	'20. 11.	15개소	35개	’21. 4. 이후
3단계	'22. 7.	20개소	58개	’22. 11. 이후
총 계		40개소	120개	-

단계별 실행방안 수립대상지

구 분	’18 ~ ’19년 (5개소/시범단계)	’19 ~ ’20년 (15개소/2단계)	’20 ~ ’22년 (20개소/3단계)
도심권	-	1개소	2개소
동북권	2개소	6개소	8개소
서북권	1개소	2개소	2개소
서남권	2개소	5개소	6개소
동남권	-	1개소	2개소

□ 점검 결과

ㅇ 지역별 중점관리사업 총괄 점검결과표

권역	자치구	지역생활권 (개소)	중점관리사업 추진현황(단위: 개)					비고
			합계	사업완료	정상추진	공정지연	계획변경
총계	23	40	120	13	85	13	9
도심권(3)	소계		6	-	2	1	3
	용산구	후암‧용산	1	-	1	-	-	2단계
	종로구	창신‧숭인	2	-	1	1	-	3단계
	중구	신당‧황학	3	-	-	-	3	3단계
동남권(3)	소계		6	-	5	1	-
	강동구	천호‧성내	2	-	2	-	-	2단계
	송파구	석촌	2	-	1	1	-	3단계
	강동구	길동‧둔촌	2	-	2	-	-	3단계
동북권(16)	소계		56	9	40	4	3
	강북구	미아	11	3	4	3	1	시범단계
	중랑구	면목	6	1	3	-	2	시범단계
	성동구	금호‧옥수	3	1	2	-	-	2단계
	광진구	자양	2	-	2	-	-	2단계
	동대문구	청량리	3	-	3	-	-	2단계
	도봉구	방학	3	3	-	-	-	2단계
	노원구	월계	4	-	4	-	-	2단계
	성북구	정릉	1	-	1	-	-	2단계
	성동구	왕십리‧행당	5	-	4	1	-	3단계
	광진구	중곡	1	-	1	-	-	3단계
	동대문구	이문‧휘경‧회기	2	-	2	-	-	3단계
	중랑구	중화‧묵동	2	-	2	-	-	3단계
	성북구	장위‧석관	1	-	1	-	-	3단계
	강북구	수유	3	-	3	-	-	3단계
	도봉구	쌍문	4	1	3	-	-	3단계
	노원구	공릉	5	-	5	-	-	3단계
서남권(13)	소계		40	3	31	5	1
	구로구	오류‧수궁	4	-	4	-	-	시범단계
	금천구	독산	4	-	4	-	-	시범단계
	양천구	목동2	2	1	1	-	-	2단계
	강서구	화곡1	1	-	-	1	-	2단계
	영등포구	대림	2	-	2	-	-	2단계
	동작구	노량진	4	1	3	-	-	2단계
	관악구	낙성대	2	-	2	-	-	2단계
	양천구	신월2	4	-	4	-	-	3단계
	강서구	화곡2	5	-	3	2	-	3단계
	금천구	시흥	4	-	2	1	1	3단계
	영등포구	신길	3	-	2	1	-	3단계
	동작구	사당	4	1	3	-	-	3단계
	관악구	신림	1	-	1	-	-	3단계
서북권(5)	소계		12	1	7	2	2
	은평구	응암	3	-	2	1	-	시범단계
	서대문구	홍제	2	-	2	-	-	2단계
	마포구	합정‧서교	3	1	2	-	-	2단계
	서대문구	신촌	3	-	1	1	1	3단계
	마포구	아현	1	-	-	-	1	3단계

※ 사업별 상세 추진실적은 중점관리사업 세부추진현황(붙임 1), 관리카드(붙임 2) 참고

ㅇ 중점관리사업 추진사항 점검 결과

① 추진완료 및 정상추진 사업 : 추진완료 13개, 정상추진 85개

② **************

- *******

권역	지역	사업명		****
도심	신당·황학 (중구)	중구청 행정복합청사 건립 및 주민편의시설 확충		****************************
		신당사거리 복합스포츠센터 건립		************
		신당 메이커스파크 건립		*********************************
동북	면목 (중랑구)	면목 유수지 시설복합화	복합문화 체육센터	********************************************
			청소년 문화의집 조성
	미아 (강북구)	삼양동 공영주차장 건립		***************************************
서남	시흥 (금천구)	시흥2동 거주자우선주차장 복합화사업		*************************************************************
서북	신촌 (서대문구)	신촌동 주민센터 일원 복합화 사업		*******************************************************************
	아현 (마포구)	신촌역~대흥역 가공배전선로 지중화사업		*******************

**********

권역	지역	사업명	**********	****
도심	창신·숭인 (종로구)	신설동역 11‧12번 출구 주변 보행환경개선사업	***********************************	********************************************************
동남	석촌 (송파구)	노외주차장을 활용한 공공체육‧복지‧편의 복합시설 건립	*****************************************************************	***************************************************
동북	왕십리· 행당 (성동구)	응봉유수지 저류조 설치와 병행하여 유수면 복개 및 주민 편익시설 조성	******************************	***********************************************************
	미아 (강북구)	화계역 지구단위계획	***************************************************	********************
		삼양지구 지구단위계획 재정비(삼양 지구중심)	********************************	*******************
		삼양사거리 교육타운 주차장 건립	*********************************	*********************
서남	화곡1 (강서구)	까치산역 지구중심 지구단위계획 재정비 (까치산 지구중심)	*************************************************************************************	*****************************************************************
	화곡2 (강서구)	봉제산 무궁화공원 활용 공영주차장 조성	******************************	**********************************
		등촌로 일대 그린뉴딜 지중화사업	*********************************	*******************************
	시흥 (금천구)	백산초등학교 지하주차장 조성사업	********************************	*************************
	신길 (영등포구)	신길5구역 부지 활용 혁신교육빌딩 건립	****************************	**************************
서북	응암 (은평구)	혁신파크 내 어린이 복합문화시설 건립	***********************************************	*******************
	신촌 (서대문구)	연희역세권 지구단위계획 수립	************************************************************************************	********************************

**************

권역	지역	사업명	****	**
동북	미아 (강북구)	공공체육시설 건립	****************************************	******************************
	청량리 (동대문구)	청량리동 주민센터 복합개발에 따른 우리동네 키움센터 확충	**************************************************************	*******************************
	방학 (도봉구)	방학2동 내 공영주차장 조성	*****************************************************	******************************
	중화·묵동 (중랑구)	봉화산로(이화교~중화역 교차로) 확폭	********************************************************************************	******************************

※ 중점관리사업 제외근거

❬지역생활권계획 실행방안 수립 및 운영기준(’21. 10.)❭

5.3.7. 관리사업 중 시 및 자치구 담당부서에서 사업추진이 불가하다고 판단하는 사업의 경우에는 시 및 자치구 주관부서와의 협의를 거쳐 관리사업에서 제외시킬 수 있다.

5.3.8.	중점관리사업의 경우 시 및 자치구 담당부서에서 예산확보 지연 등의 사유로 사업이 지연되는 경우 시 및 자치구 주관부서와의 협의를 거쳐 관리사업으로 변경할 수 있다.

□ 향후 계획

ㅇ ’23. 1. ~ : 지역생활권 실행방안 중점관리사업 추진실적 점검계획 수립 및 점검 실시

붙임  1. 지역생활권 실행방안 중점관리사업 세부추진현황 1부.
2. 중점관리사업 추진사항 관리카드 1부.  끝.