문서번호	기전과-33040
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		박요셉	12/29
			김은덕
협조

원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「문정지구 도시개발사업 및 문정 동남로 가로조성 관련 교통신호기 설치공사」

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

「문정지구 도시개발사업 및 문정 동남로 가로조성 관련 교통신호기 설치공사」

2022. 12. 29.

동부도로사업소

(기전과)

원인자부담공사 변경승인 검토 보고

문정지구 도시개발사업 및 문정 동남로 가로조성 관련 교통신호기 설치공사 관련 원인자부담공사 변경승인 요청에 대한 검토 보고

Ⅰ		관련 근거

□ 교통안전시설물(원인자) 설치공사 공사기간변경 승인 요청(문정지구 택지 및 문정 동남로)

ㅇ *********************************

□ 2014년도 제1차 교통안전시설 심의결과 통보(하달)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-1694호(2014.01.17.)

□ 2020년도 제3차 교통안전시설 심의결과 통보(하달)

ㅇ 서울특별시경찰청 교통관리과-7880호(2020.04.24.)

Ⅱ		공사 개요

□ 공 사 명 : 문정지구 도시개발사업 교통신호기 설치공사 문정 동남로 가로조성 관련 교통신호기 설치공사

□ 공사위치 : 송파구 문정동 도시개발구역

□ 공사기간 : *****************

□ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
신 호	******** *****	******	********	*******
			********	******** *****

Ⅲ		검토 내용

□ 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
공사기간	*****************	*****************

□ 변경사유 : 선행 공종 준공연기에 따른 공사일정 지연

Ⅳ		검토 의견

□ 우리 사업소로의 교통신호기 인수인계 행정절차 이행을 위해 승인기간 연기 필요

□ 변경승인 서류를 검토한 바 적정하여 승인 처리하고자 함

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 제출 서류 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 설계도면 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.