아이 키우기 좋은 도시 서울, "엄마아빠 행복 프로젝트"
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(서울 시네마테크 건립공사 관련 화물연대 파업으로 인한 소요자재 수급 지연 등 공기 연장 실정보고 승인 통보)

1.업무지시현장 : 서울 시네마테크 건립공사

2.작 성 일 자 : 2022-12-29 16:12:24

3.지 시 내 용

가. 근정시네 제2022-560(2022.12.26.)호, '공사기간 영향 현안 요인 및 지연 공정 만회대책 검토 보고' 관련입니다.

나. 제2차 화물연대 파업에 따른 소요자재 수급 지연 등 공기 연장(17일) 실정보고를 승인하오며, 제출된 공정 지연 만회대책에 따라 원활히 공사가 추진될 수 있도록 관리·감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

다. 변경 전,후 공사예정공정표 등을 포함하여 준공기한 연기(총차,2차) 요청하시기 바랍니다.  끝.

주무관	이범식		문화시설과장	왕승찬		건축부장	12/29
代차무흥
협조자
시행	건축부-35777	(	2022. 12. 29.	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 13층(서울특별시 도시기반시설본부 건축부) (무교동, 프리미어플레이스)	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-6438-2231	/전송	02-6438-2299	/	archilbs@seoul.go.kr	/	부분공개(5)