주무관		주거정비계획팀장		주거정비과장	도시관리국장
조재숙		장수진		문철수	12/29
					代이정희
협조

문서번호	주거정비과-24412
결재일자	2022. 12. 29.
공개여부	부분공개(6)

2022년 안전취약시설 보수·보강 사업 완료 보고

- 성수동2가 590-1 진주타운 외부담장 -

2022년 안전취약시설 보수·보강 사업 완료

우리 구 정비구역 내 성수동2가 590-1 지상 노후 연립주택 외부 담장이 도로로 전도위험이 있어 2022년 안전취약시설 보수·보강사업 공모에 선정 후 담장 재축조 공사 완료되어 결과를 보고드림

Ⅰ		추진근거

「재난 및 안전관리 기본법 제31조(재난예방을 위한 안전조치)

안전취약시설 보수·보강 2차 사업 선정(서울시 시설안전과-24985호, 2022.6.28.)

2022년 안전취약시설 보수·보강 사업 시행계획(주거정비과-14224호, 2022.9.20.)

Ⅱ		사업개요

사 업 명: 성수동2가 590-1 외부담장 보수·보강 공사

위    치: 성동구 성수동2가 590-1 진주타운 외부(서측) 담장

❍ 대지면적: 3,620㎡

❍ 건축규모: 지하1층, 지상3층, 연면적 4,319.67㎡, 공동주택 3개동 60세대

담장규모: B=0.2m, L=63m, H=1.8m

공사기간: 2022.10.4.~ 10.17.

사 업 비: 40,000천원(시비)

공사업체: 연가단가 계약업체 ㈜임현건설

주요사업 내용

❍ 담장 철거, 수목(3그루) 제거

❍ 콘크리트 포장 깨기 및 무근구조물 헐기 63.3㎥

❍ 담장설치 119.3㎥, 콘크리트 포장 0.71a 등

Ⅲ		추진경위

2022. 5.31.  위험시설물 신고 및 현장 확인

2022. 6. 3.  안전취약시설 공모 신청

2022. 6.28.  안전취약시설 보수·보강 2차 사업 선정

2022. 7. 1.  서울시 보조금 교부

2022. 8.16.  안전취약시설 보수·보강 동의서 및 주민 추천(입주자대표→구)

2022. 9.20.  2022년 안전취약시설 보수·보강 사업 시행계획 수립

2022. 9.21.  공사 및 감독 의뢰(주거정비과→토목과)

2022. 9.26.  공사시행 알림(토목과→주거정비과, 성수2가1동, 교통지도과)

2022. 9.28.  공사시행 알림(구→입주자대표),

순찰 강화 등 협조 요청(구→성동경찰서)

2022.10.24. 공사 완료 알림(토목과→주거정비과)

2022.12.28. 공사비 지급(㈜임현건설, 40,000천원)

Ⅳ		공사현황

공사 시공 전

성수동2가 590-1 진주타운 외부 담장 시공 전

공사 중

성수동2가 590-1 진주타운 외부 담장 시공 중

공사 완료

성수동2가 590-1 진주타운 외부 담장 공사 완료

Ⅴ		향후계획

2022.12.  공사완료에 따른 정산보고(區 → 市 시설안전과)

2023. 1.  진주타운 주민살피미 사후관리 요청(區 → 입주자대표)

Ⅵ		행정사항

주민(진주타운 소유·거주자) 살피미를 통한 사후관리

❍ 주민 살피미: 총 3명

연번	동별	성명	연락처
1	********	***	*************
2	********	***	*************
3	********	***	*************

※ 진주타운 입주자대표회장(**************************)

붙임  외부담장 보수·보강 공사 완료 보고 1부(성수동2가 590-1 진주타운).  끝.