문서번호	정보공개정책과-29197
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	기록관리팀장	정보공개정책과장
최지현	김성민	07/21
		김숙희

용역 계약기간 연장 계획

[디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역]

2022. 7.

행  정  국

(정보공개정책과)

용역 계약기간 연장 계획

[디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역]

정보공개정책과 과장 : 김숙희☎2133-5698 기록관리팀장 : 김성민☎5692 담당 : 최지현☎5695

「디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역」 관련, 실시설계 기간이 추가 소요됨에 따라 용역 계약기간을 연장하고자 함

1		용 역 개 요

ㅇ 용 역 명 : 디지털 기록문화관 실시설계 및 제작·설치 용역

ㅇ 용역업체 : ****

ㅇ 계약금액 : **********************

ㅇ 계약기간 : 2022. 5. 20. ~ 2022. 8. 31. (※ 착수일 : 2022. 5. 24.)

ㅇ 과업내용 : 공간 실시설계, 전시콘텐츠 기획·제작, 현장설치 등

2		추 진 경 위

ㅇ 용역 업체 선정 및 계약                   :  ’22. 3. ~ 5.

ㅇ 실시설계(전문가 자문 및 유관부서 의견 반영)    :  ’22. 6. ~ 7.

- 1차 자문(*************)                :  ’22. 6. 15.

- 2차 자문(*************)                :  ’22. 6. 17.

- 전기ㆍ통신 실시설계 협의(총무과 및 서울도서관) :  ’22. 7. 5.

- 3차 자문(*************)                :  ’22. 7. 12.

3		준공기한 연기

ㅇ 변동사항

구분	당초	변경	비고
준공일	2022년 8월 31일	2022년 9월 30일	*** *****

ㅇ 준공기한 연기사유

- ****************************************** *********************************

****************

******************************************

******************************************

- *************************************** ************

ㅇ 지체상금 :****

4		향 후 계 획

ㅇ 실시설계에 따른 공사자재 및 HW 발주 : 7. 22. (금) ~ 7. 29. (금)

ㅇ 철거 및 HW 설치, 전시연출 공사 진행 : 8. 1. (월) ~ 8. 31. (수)

ㅇ SW 현장적용 및 시범운영 완료(준공)   : 9. 30. (금)